2018년 주요업무	하수시설팀

구랑마을 하수도 설치사업

◦ 농어촌지역 주민 생활수준 향상으로 생활하수 발생량 증가

◦ 수질오염 예방으로 양질의 농업용수 확보 및 주거생활환경 개선

□ 사업개요

◦ 위    치 : 사천시 서포면 구랑마을 일원

◦ 사 업 량 : 하수처리장 설치 Q=45㎥/일, 하수관로 L=2.69㎞

◦ 사업기간 : 2018. 1. ~ 2020. 12.

◦ 사 업 비 : 3,142백만원 (국비 70%, 도비 15%, 시비 15%)

□ 투자계획

(단위:백만원)

구 분	계	2018년	2019년이후
계	3,142	429	2,713
국 비	2,199	300	1,899
도 비	471.5	64.5	407
시 비	471.5	64.5	407

□ 추진성과

◦ 2017.  3. : 국고보조사업 신청

◦ 2017. 12. : 국고보조사업 확정내시

◦ 2018.  3. : 국고보조금 교부 결정 통보

◦ 2018.  6. : 실시설계용역 발주

□ 추진계획

◦ 2018. 6. ~ 2019. 3. : 실시설계용역 추진

◦ 2019. 1. : 사업비 재원협의

◦ 2019. 5. : 사업 착공

□ 기대효과

◦ 농어촌지역 생활여건 개선