2018년 주요업무	하수운영팀

사천공공하수처리시설 증설사업

◦ 읍․면지역의 택지개발과 처리구역 확대에 따른 하수량 증가로 시설용량 한계 도달

□ 사업개요

◦ 위    치 : 사천시 사남면 공단2로 193 (사천공공하수처리장 내)

◦ 사 업 량 : 증설용량 Q=10,000㎥/일

※ 시설용량 Q=18,000㎥/일 → Q=28,000㎥/일

◦ 사업기간 : 2017년 ~ 2020년 (4년간)

◦ 사 업 비 : 26,713백만원 (국비 70%, 도비 15%, 시비 15%)

□ 추진성과

◦ 2017. 3. : 2018년도 국고보조사업 신청(환경부)

◦ 2017. 5. : 사천공공하수처리시설 증설사업 추진계획 보고

◦ 2017. 6. : 환경부 승인 (증설용량 Q=10,000㎥/일)

◦ 2017. 8. : 사업수행능력평가서 제출 안내 공고

◦ 2018. 3. : 공법선정 기술제안서 제출 안내 공고

□ 추진계획

◦ 2017. 9. ~ 2018. 12. : 기본 및 실시설계

◦ 2018. 7.  : 하수처리 공법선정심의 위원회 개최

◦ 2019. 2.  : 공사 착공

◦ 2020. 12. : 공사 준공

□ 기대효과

◦ 공공하수처리시설의 증설에 따라 생활하수를 효과적으로 처리하여

방류해역의 수질오염 방지