2018년 주요업무	하수시설팀

늑도마을 하수도 설치사업

◦ 농어촌지역 주민 생활수준 향상으로 생활하수 발생량 증가

◦ 사천바다케이블카 운행에 따른 오수처리 만전

□ 사업개요

◦ 위    치 : 사천시 동서동 늑도마을 일원

◦ 사 업 량 : 하수관로 L=1.45㎞, 맨홀펌프장 1개소

◦ 사업기간 : 2017. 1. ~ 2018. 12.

◦ 사 업 비 : 1,045백만원 (국비 70%, 도비 15%, 시비 15%)

□ 투자계획

(단위:백만원)

구 분	계	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	1,045		428	617
국 비	732		300	432
도 비	156.5		64	92.5
시 비	156.5		64	92.5

□ 추진성과

◦ 2017.  1. : 국고보조사업 확정 내시

◦ 2017.  5. : 실시설계 착수

◦ 2017.  8. : 재원협의 (낙동강유역환경청)

◦ 2017. 12. : 2017년분 공사착수

◦ 2018.  1. : 2018년분 공사착수

※ 공 정 률 : 43%

□ 추진계획

◦ 2018. 6. ~ 12. : 사업추진 (’17년분, ’18년분 추진)

□ 기대효과

◦ 농어촌지역 생활여건 개선