2017 주요업무 추진계획

2017년 계획 (정책비전)	지역개발과

미래정책 비전

시 비전		시민이 행복한 20만 강소도시 건설
부서 비전		현장행정 중심으로 시민만족도 향상
정책목표		∙ 주민과 함께하는 창조적 지역개발사업 발굴 ∙ 공모사업의 전략적 지원으로 지방재원 확충 ∙ 주민공동체를 중심으로 활력넘치는 마을 조성
추진전략		주 요 과 제
주민과 함께하는 지역개발		∙ 주민주도형 마을 만들기 및 농촌현장포럼 추진 ∙ 소규모 마을가꾸기사업 추진 등 주민역량강화
공모사업의 전략적 지원		∙ 공모사업의 전략적 지원으로 지방재원 확충 ∙ 공모사업 관련 담당공무원 역량강화
활력넘치는 농어촌마을 조성		∙ 주민체감형 프로그램 추진 및 살맛나는 마을조성 ∙ 체계적인 도서개발사업으로 어촌지역 경쟁력 강화

2017년 계획 (일반사업)	균형발전담당

주민주도형 일반농산어촌개발사업 발굴

◦ 중장기 계획에 따른 지역의 특성에 맞는 맞춤형 역량강화

◦ 일반농산어촌 지역에 거주하는 주민들의 기초생활수준 보장

◦ 농산어촌의 인구유지 및 지역별 특색있는 발전 도모

□ 사업개요

◦ 사업기간 : 연중

◦ 사업내용

- 마을리더 및 담당공무원 역량강화교육

- 마을발전계획수립을 위한 농촌현장포럼

- 소규모 마을가꾸기사업으로 마을별 주민역량강화

- 신규사업 신청 예비지구 사업계획서 수립

□ 추진계획

◦ 2017. 1. : 2018년 신규사업 신청 및 경남도 심사

◦ 2017. 4. : 2018년 신규사업 중앙심사

◦ 2017. 4. : 2019년 신청예비지구 농촌현장포럼 및 지역역량강화사업

◦ 2017. 6. : 소규모 마을가꾸기사업 추진

◦ 2017. 9. : 2018년 일반농산어촌개발사업 확정

◦ 2017. 9. : 2019년 일반농산어촌개발사업 신청예비지구 사업계획서 작성

◦ 2017. 12. : 2019년 신청예비지구 사업계획서 컨설팅 및 완성

□ 2016년과 달라진 점

◦ 일반농산어촌개발사업 신규 추가 : 9건

2017년 계획 (일반사업)	균형발전담당

공모사업 응모지원 및 관리

◦ 정부 공모사업 분석을 통한 우리시 정책에 맞는 사업 발굴 지원

◦ 선택과 집중을 통한 열악한 지방재원 극복

□ 사업개요

◦ 대     상 : 1천만원(국+도비 합계액)이상 공모사업

◦ 공모사업의 단계별 대응시스템 강화 및 효율적 관리

- 공모사업 발굴 ⇒ 공모사업 응모 ⇒ 부처심사(서류, 현장실사,

발표․평가) ⇒ 공모사업 선정 ⇒ 사업진행 ⇒ 사후평가

□ 추진계획

◦ 공모사업 관계공무원 역량강화 교육

- 시  기 : 상 ‧ 하반기(연 2회)

- 대  상 : 각 부서별 공모사업 담당자

- 내  용 : 정책과제 개발 연구, 국비사업 발굴 및 확보요령 등

◦ 공모사업 해당부서의 사업계획서 작성 지원

- 경쟁력 있는 사업계획서 작성을 위한 예산확보 : 150백만원

◦ 공모사업의 효율적 관리

- 공모사업 응모여부 의견서 및 관리카드 작성·관리

- 공모사업 추진현황 및 신규 공모사업 동향 게재

- 부서별 공모사업 담당자 지정 및 교육

□ 2016년과 달라진 점

◦ 공모사업 관계공무원 역량강화교육 실시 : 2회, 60명

◦ 우리 시 정책에 맞는 공모사업 전문가 컨설팅 실시 : 1회

2017년 계획 (일반사업)	농촌개발담당

농촌중심지활성화사업

◦ 농촌의 쾌적한 생활환경 조성으로 기초생활 및 문화수준 향상

◦ 농촌 인구유지 및 지역별 특화 발전 도모

□ 사업개요

사업명	위치	사업기간	총사업비 (백만원)	사 업 량	비고
합 계	4개소		32,900
곤양면 소재지 종합정비 사 업	곤양면 소재지 일 원	2014. ~ 2017. (4년간)	6,500	· 도시계획도로, 남문 상징물, 가로경관 정비 및 곤양천 수변산책로 조성 등	계속
곤명면 소재지 종합정비 사 업	곤명면 소재지 일 원	2016. ~ 2020. (5년간)	5,400	· 다솔문화센터, 공동생활 홈 조성 및 김동리 산책로 정비 등	계속
사천읍 농 촌 중심지 활성화 사 업	사천읍 중심지 일 원	2017. ~ 2020. (4년간)	8,000	· 상인활력센터 조성, 걷고 싶은 시장길 조성, 다문화 통합지원센터 조성 및 지역역량강화사업 등	신규
사남면 농 촌 중심지 활성화 사 업	사남면 죽천리외 1개소	2017. ~ 2020. (4년간)	6,000	· 문화복지센터 조성, 나눔 실버보행기시범운영, 교통ICT 확충사업, 공동생활 홈 조성 및 지역역량강화사업 등	신규

□ 추진계획

사 업 명	추 진 계 획	비고
곤양면소재지 종합정비사업	· 2017. 2월 : 보상협의 지속 추진 · 2017. 3월 : 화초골 도시계획도로개설 착공 · 2017. 5월 : 마을회관 리모델링 착공
곤명면소재지 종합정비사업	· 2017. 2월 : 시행계획수립 착수 · 2017. 9월 : 시행계획수립 승인 · 2017. 11월 : 공사 착공
사천읍 농촌중심지활성화사업	· 2017. 3월 : 기본계획 수립 착수 · 2017. 10월 : 기본계획 수립 승인·고시 · 2017. 11월 : 시행계획 수립 착수
사남면 농촌중심지활성화사업	· 2017. 3월 : 기본계획 수립 착수 · 2017. 10월 : 기본계획 수립 승인·고시 · 2017. 11월 : 시행계획 수립 착수

□ 2016년과 달라진 점

◦ 한국농어촌공사 서부지사와 위(수)탁 계약 해지로 시 직영 시행 : 1건(곤양면)

◦ 농촌중심지활성화사업 신규 추가 : 2건(사천읍, 사남면)

2017년 계획 (일반사업)	농촌개발담당

권역단위 창조적마을만들기사업

◦ 농촌의 쾌적한 생활환경 조성으로 기초생활 및 문화수준 향상

◦ 농촌 인구유지 및 지역별 특화 발전 도모

□ 사업개요

사업명	위치	사업기간	총사업비 (백만원)	사 업 량	비고
합 계	4개소		16,184
정동권역	정동면 (고읍, 예수, 수청)	2015. ~ 2018. (4년간)	3,286	· 정동권역 교류센터, 성황당 산성 산책로정비 및 지역역량강화사업 등	계속
송포권역	송포동 (대방, 실안, 산분령)	2014. ~ 2017. (4년간)	3,498	· 두드림 활성화센터, 실안 산책로 조성 및 지역역량강화사업 등	계속
상남권역	사남면 (우천, 가천 등)	2014. ~ 2017. (4년간)	4,900	· 와룡교류센터, 마을 숲 정비, 소공원 조성 및 지역역량강화사업 등	계속 (위탁)
용현권역	용현면 (송지, 금문, 주문)	2014. ~ 2017. (4년간)	4,500	· 한뜰문화교류센터, CCTV설치 18개소 및 지역역량강화사업 등	계속 (위탁)

□ 추진계획

사 업 명	추 진 계 획	비 고
정동권역	· 2017. 1월 : 시행계획수립 착수 · 2017. 9월 : 시행계획 수립·승인 · 2017. 10월 : 공사 착공
송포권역	· 2017. 1월 : 두드림 활성화센터 공사 착공 · 2017. 9월 : 실안산책로조성 착수
상남권역	· 2017. 2월 : 마을 숲 정비 착공 · 2017. 4월 : 사촌마을 진입로 및 계양마을 안길정비 착공 · 2017. 10월 : 총괄 준공 예정
용현권역	· 2017. 2월 : 사천대교 주변 공원조성 착공 · 2017. 9월 : 공사 준공 · 2017. 10월 : 총괄 준공 예정

□ 2016년과 달라진 점

◦ 한국농어촌공사 서부지사와 위(수)탁 계약 해지로 시 직영 시행 : 2건(정동권역, 송포권역)

2017년 계획 (일반사업)	농촌개발담당

마을단위 창조적마을만들기사업

◦ 농촌의 쾌적한 생활환경 조성으로 기초생활 및 문화수준 향상

◦ 농촌 인구유지 및 지역별 특화 발전 도모

□ 사업개요

사업명	위치	사업기간	총사업비 (백만원)	사 업 량	비고
합 계	6개소		4,199
신송창조적 마을만들기	용현면 신송일원	2016. ~ 2018.	500	· 문화복지관 조성 및 청소년 복지관 연계프로그램운영	계속
소곡창조적 마을만들기	정동면 소곡일원	2017. ~ 2019.	1,000	· 문화마당, 공동생활 홈 조성 및 교통안전시설 설치 등	신규
성방창조적 마을만들기	곤명면 성방일원	2017. ~ 2018.	500	· 어울림문화센터, 공동생활 홈 조성 및 문화예술 동아리 외2개 운영 등	신규
용산창조적 마을만들기	곤명면 용산일원	2017. ~ 2018.	500	· 문화커뮤니티센터, 마을CCTV 및 무선방송 시스템 설치 등	신규
용산창조적 마을만들기	축동면 용산일원	2017. ~ 2018.	499	· 공동생활 홈, 도라지 꽃길 및 광장조성 등	신규
석문창조적 마을만들기	곤양면 석문일원	2017. ~ 2018.	500	· 갯바람길 조성, 공동생활 홈 조성 등	신규

□ 추진계획

사 업 명	추 진 계 획	비고
신송 창조적마을만들기	· 2017. 3월 : 문화복지관 착공 · 2017. 7월 : 문화복지관 준공
소곡 창조적마을만들기	· 2017. 3월 : 용역 착수 · 2017. 8월 : 기본 및 시행계획 승인·고시 · 2017. 10월 : 문화마당조성사업 등 착공
성방 창조적마을만들기	· 2017. 3월 : 용역 착수 · 2017. 8월 : 기본 및 시행계획 승인·고시 · 2017. 10월 : 어울림문화센터 착공
용산(곤명) 창조적마을만들기	· 2017. 3월 : 용역 착수 · 2017. 8월 : 기본 및 시행계획 승인·고시 · 2017. 10월 : 문화커뮤니티센터 착공
용산(축동) 창조적마을만들기	· 2017. 3월 : 용역 착수 · 2017. 8월 : 기본 및 시행계획 승인·고시 · 2017. 10월 : 도라지꽃길조성사업 등 착공
석문 창조적마을만들기	· 2017. 3월 : 용역 착수 · 2017. 8월 : 기본 및 시행계획 승인·고시 · 2017. 10월 : 갯바람길 정비사업 등 착공

□ 2016년과 달라진 점

◦ 창조적 마을 만들기사업 신규 추가 : 6건

2017년 계획 (일반사업)	개발지원담당

도서종합개발(특수상황지역)사업

◦ 천혜의 자연환경 활용으로 사계절 생태관광 섬으로 육성

◦ 관광, 체험 등 종합관광 휴양 섬 개발과 훼손된 경관에 대한 치유로

쇠퇴하는 도서지역 재생 및 주민소득 창출

□ 사업개요

◦ 신수도 섬일주 도보길 조성사업

- 위    치 : 사천시 동서동 신수도 일원

- 사업기간 : 2016. 1. ~ 2017. 12.

- 사 업 비 : 767백만원(국 80%, 도 10%, 시 10%)

- 사 업 량 : 탐방로 개설 L=3Km

◦ 늑도 관광기반시설확충사업

- 위    치 : 사천시 동서동 늑도 일원

- 사업기간 : 2016. 1. ~ 2017. 12.

- 사 업 비 : 1,000백만원(국 80%, 도 10%, 시 10%)

- 사 업 량 : 펜션 리모델링 A=495㎡

□ 추진계획

◦ 신수도 섬일주 도보길 조성사업 : 사업완료

◦ 늑도 관광기반시설확충사업 : 공사발주 및 준공

□ 2016년과 달라진 점

◦ 지역발전특별회계 인센티브 214백만원 확보

- 신수도 섬 일주 도보길 조성사업비 추가 편성 투입

2017년 계획 (역점사업)	개발지원담당

사천IC일원 복합유통 상업단지 조성사업

◦ 사천 IC 일원 폐고속도로 부지 복합유통상업단지 조성으로

상업․물류 인프라 수요증가 대비 및 지역 경기부양 거점 확보

◦ 사천시 관문 경관 조성 및 토지이용 효율성 증대

□ 사업개요

◦	위치/면적	:	축동면 사다리 87번지 일원(사천 IC 주변) / 277,270㎡
◦	사 업 기 간	:	2015년 ~ 2018년
◦	총 사 업 비	:	600여억 원
◦	사업시행자	:	사천IC도시개발(주)
◦	시 행 방 식	:	민·관합동개발(SPC)
◦	사 업 내 용	:	물류시설, 판매시설, 농수산물유통센터, 업무시설,
			오피스텔, 기타 근린생활시설 등

□ 추진성과

◦ 우선협상대상자 선정 / 투자협약 및 사업협약 체결

◦ 특수목적법인(SPC) 설립 완료(‘16. 6. 29.)

□ 추진계획

◦ ‘17. 1. : 도시개발구역 지정

◦ ‘17. 6. : 실시계획인가 고시

◦ ‘17. 7. ~ ’18. 12. : 사업시행 및 분양

□ 기대효과

◦ 시 관문 경관 개선으로 시 랜드마크 조성

◦ 교통 요충지에 위치한 신 상권 조성으로 지역경제 활성화

2017년 계획 (역점사업)	개발지원담당

삼천포 구 역사주변 도시개발사업

◦ 삼천포 구 역사부지의 계획적이고 체계적인 도시개발로 난개발 방지 및

상업 중심지로서의 이미지 제고

◦ 기반시설 확충 및 상업부지 개발을 통한 지역경기 활성화

□ 사업개요

◦	위치/면적	:	동금동 151-5번지 일원 / A=25,714㎡
◦	사 업 기 간	:	2012년 ~ 2017년
◦	총 사 업 비	:	90억원
◦	사업시행자	:	공영개발(사천시)
◦	시 행 방 식	:	수용방식
◦	용도지역	:	일반상업지역(건폐율80%, 용적률800%)

□ 추진성과

◦ 사업 추진방법 변경으로 기간단축(도시개발사업→대지조성 사업)

◦ 주택법에 따른 대지조성사업 승인

□ 추진계획

◦ ‘17. 1. : 국․공유지 매입 협의 및 손실보상

◦ ‘17. 3. : 공사 발주

◦ ‘17. 12. : 준공 및 분양

□ 기대효과

◦ 상업용지의 효율적인 토지이용으로 도심미관 개선

◦ 지역경제 활성화 도모 및 지역특성을 반영한 랜드마크 조성

2017년 계획 (신규시책)	균형발전담당

일반농산어촌개발사업 읍 ‧ 면 순회교육 실시

◦ 일반농산어촌개발사업의 목적 및 정확한 개념이해를 위한 교육 실시

◦ 주민이 주도하여 마을의 특색있는 자원발굴 및 마을발전계획을

수립할 수 있는 분위기 조성으로 활기찬 농촌지역 활성화 도모

□ 교육개요

◦ 교육시기 : 2017. 5월 ~ 7월

◦ 교육대상 : 읍‧면 마을이장, 조직단체 임원

◦ 교육장소 : 해당 읍‧면사무소 회의실

◦ 강    사 : 일반농산어촌개발사업 전문강사(섭외)

◦ 교육내용

- 일반농산어촌개발사업 사업개요

- 일반농산어촌개발사업 단계별 추진체계 구축요령

- 일반농산어촌개발사업 기능별 사업내용 이해 등

□ 추진일정

◦ 2017. 1월 : 일반농산어촌개발사업 전문강사 섭외

◦ 2017. 2월 : 읍‧면별 교육일정 파악

◦ 2017. 3월 : 일반농산어촌개발사업 읍‧면 순회교육 계획 수립

◦ 2017. 5월 ~ 7월 : 읍‧면별 순회교육 실시

◦ 2017. 8월 ~ 10월 : 일반농산어촌개발사업 신청마을 접수

□ 기대효과

◦ 일반농산어촌 개발사업 순회교육을 통한 주민 역량강화

◦ 주민주도형 색깔있는 마을 조성으로 공동체활동 활성화