사천시 고시 제2018-207호

삼천포 구역사 주변 대지조성사업을 위한 도시계획시설[도로(중로3-21호선, 소로1-87호선), 주차장, 공원(역사공원)]사업 실시계획변경인가 고시

사천시 고시 제2016-187호(2016.09.09.)로 대지조성사업 승인․고시되고 사천시 고시 제2017-224호(2017.11.23.)로 실시계획 변경인가된 도시계획시설[도로(중로3-21,소로1-87호선), 주차장, 공원(역사공원)]에 대하여「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제88조 및 같은 법률 시행령 제97조의 규정에 의거 도시계획시설사업 실시계획 변경 인가하고 같은 법률 제91조 및 같은 법률 시행령 제100조의 규정에 의거 그 변경 인가 내용을 고시합니다.

2018년  11월  08일

사  천  시  장

1. 실시계획인가 내용(변경)

가. 사업시행지의 위치 : 사천시 동금동 151-5번지 일원

나. 사업의 종류 및 명칭

1) 사업의 종류 : 도시계획시설[도로(중로3-21,소로1-87호선),주차장,공원]사업

2) 사업의 명칭 : 삼천포 구역사 주변 대지조성사업

다. 사업의 면적 또는 규모 : A=11,886㎡

구분	총면적(㎡)	도로(㎡)	주차장(㎡)	공원(㎡)	비고
면적	11,886	3,064	1,434	7,388

라. 사업시행자의 성명 및 주소

1) 성  명 : 사천시장(지역개발과장)

2) 주  소 : 경남 사천시 용현면 시청로 77(사천시청)

마. 사업의 착수예정일 및 준공예정일(변경)

1) 착수예정일 : 2016. 11. 17 (실시계획 인가일)

2) 준공예정일 :□ 기정 : 2018. 12. 31

□ 변경 : 2019. 12. 31

바. 수용 또는 사용할 토지 또는 건물의 소재지·지번·지목 및 면적, 소유권과 소유권 외의 권리의 명세 및 그 소유자·권리자의 성명·주소(변경)

■ 토지조서(변경)

순번	위치	지번	지목	대장면적 (㎡)	편입면적 (㎡)	소 유 자		소유권 이외의 권리명세			비고
						주 소	성 명	주 소	성 명	권리의종류및내용
1	동금동	151-5	전	1,336	26		경상남도				기정
							사천시				변경
2	동금동	151-8	도	73	73		국(기획재정부)				기정
							사천시				변경
3	동금동	153-4	도	24	24		국(기획재정부)				기정
							사천시				변경
4	동금동	153-6	철	341	160		국(기획재정부)				기정
							사천시				변경
5	동금동	154-8	도	13	13		국(기획재정부)				기정
							사천시				변경
6	동금동	154-9	도	26	26		국(기획재정부)				기정
							사천시				변경
7	동금동	155-1	도	7	7		국(국토교통부)				기정
							사천시				변경
8	동금동	155-4	답	536	2		국(기획재정부)				기정
							사천시				변경
9	동금동	535-4	도	391	46		국(국토교통부)				기정
							사천시				변경
10	향촌동	1016	전	99	99		국(재정경제부)				기정
							사천시				변경
11	향촌동	1019	전	1,268	249		경상남도				기정
							사천시				변경
12	향촌동	1012-3	답	25	25		국(재정경제부)				기정
							사천시				변경
13	향촌동	1012-4	철	106	106		국(건설교통부)				기정
							사천시				변경
14	향촌동	1012-5	답	223	223	사천시 송포동	이0윤				기정
							사천시				변경
15	향촌동	1014-2	전	309	4		국(기획재정부)				기정
							사천시				변경
16	향촌동	1014-3	답	42	42		국(기획재정부)				기정
							사천시				변경
17	향촌동	1014-4	대	228	228	사천시 서항길	하0남	주공로2 (벌리동)	삼천포농협협동조합	근저당권 지상권	기정
							사천시				변경
18	향촌동	1014-5	철	12	12		국(건설교통부)				기정
							사천시				변경
19	향촌동	1014-6	철	226	226	사천시 송포동	이0윤				기정
							사천시				변경
20	향촌동	1014-7	철	2	2		국(건설교통부)				기정
							사천시				변경
21	향촌동	1014-8	철	37	37		국(건설교통부)				기정
							사천시				변경
22	향촌동	1014-9	답	77	77		국(재정경제부)				기정
							사천시				변경
23	향촌동	1015-4	대	140	140	사천시 서항길	하0남(463/655)	주공로 2(벌리동)	삼천포농협협동조합	근저당권 지상권	기정
						사천시 서항길	하0남(192/655)
							사천시				변경
24	향촌동	1015-5	철	72	72		국(건설교통부)				기정
							사천시				변경
25	향촌동	1015-7	철	366	366	사천시 송포동	이0윤				기정
							사천시				변경
26	향촌동	1016-2	철	185	185	사천시 송포동	이0윤				기정
							사천시				변경
27	향촌동	1017-1	전	104	104		국(기획재정부)				기정
							사천시				변경
28	향촌동	1017-2	전	66	65		국(기획재정부)				기정
							사천시				변경
29	향촌동	1017-3	전	132	1		국(기획재정부)				-
30	향촌동	1018-1	전	205	31		국(기획재정부)				기정
							사천시				변경
31	향촌동	1018-2	전	297	19		국(기획재정부)				기정
							사천시				변경
32	향촌동	1018-5	전	16	16		국(기획재정부)				기정
							사천시				변경
33	향촌동	1018-6	전	531	132		국(기획재정부)				-
34	향촌동	1018-7	전	180	13		국(기획재정부)				기정
							사천시				변경
35	향촌동	1019-1	전	3,081	178		경상남도				기정
							사천시				변경
36	향촌동	1112-4	답	22	16		국(건설교통부)				-
37	향촌동	1112-5	답	152	8		국(건설교통부)				-
38	향촌동	1281-22	전	33	33		국(기획재정부)				기정
							사천시				변경
39	향촌동	1281-23	도	16	16		국(건설교통부)				기정
							사천시				변경
40	향촌동	181-3	도	121	10		국(국토교통부)				기정
							사천시				변경
41	동금동	40-7	공	7,388	7,388		사천시				-
42	동금동	143	도	117,009	1,386		사천시				-
합 계				135,517	11,886

2. 관계도서는 사천시청 도시과에 비치하였으며, 기타 상세한 사항은 도시과(☎055-831-3177) 및 지역개발과(☎055-831-3245)로 문의하시기 바랍니다.