정주기반확충 및 권역단위 마을 종합

관리번호		2-13		주관부서		지역개발과 (농촌개발담당)
임기구분		사업구분		예산구분		추진현황					이행률 (%)
임기내	중장기	신규	계속	예산	비예산	완료		추진중		미착수
						종료	지속추진	정상	부진
	○		○	○				○			70

*이행률 : 공약완료시기 대비 현재까지의 추진율 기재

ㅇ 마을 진입도로 및 주차장 등의 설치로 살기 좋은 농촌마을 조성

ㅇ 농촌생활환경정비로 농촌 주민들의 삶의 질 향상

ㅇ 농촌마을 종합정비로 농촌의 지역별 특색 있는 발전 도모

□ 사업개요

ㅇ  위    치 : 사천시 면지역(용현, 사남, 정동)

ㅇ  사업기간 : 2014년 ~ 2018년

ㅇ  사 업 량

- 권역단위 종합정비 : 3개소

ㅇ  사 업 비 : 12,686백만원(국비 8,880, 도비 1,142, 시비 2,664)

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	임기내					2018이후 (임기후)
			소계	2015	2016	2017	2018
계	12,686	3,169	9,517	2434	4,200	1,464	1419
국 비	8,880	2,219	6,661	1,704	2,940	1,024	993
도 비	1,142	285	857	219	378	132	128
시 비	2,664	665	1,999	511	882	308	298

□ 연도별 달성목표

단위사업	완료목표	2014	2015	2016	2017	2018	2018이후
추진율(누계)	100%	10%	20%	30%	70%	80%	100%
권역단위종합개발사업		계획수립 (용현권역, 상남권역)	보상 및 공사 (용현권역, 상남권역) 계획수립 (정동권역)	공사 (용현권역) 보상 및 공사 (상남권역, 정동권역)	공사 및 준공 (용현권역, 상남권역) 보상 및 공사 (정동권역)	공사 (정동권역)	공사 및 준공 (정동권역)

□ 추진실적

〈용현권역단위 종합정비사업〉

ㅇ ‘13. 11. : 주민공청회 및 발전협의회 개최, 도 기본계획 협의, 기본계획수립 및 고시

ㅇ ‘14.  9. : 용현권역 시행계획수립 및 고시

ㅇ ‘14. 11. : 공사 착공

ㅇ ‘16.  7. : 해안공원, 가로경관 정비 완료, 한뜰문화 교류센터 풋살장 완료

ㅇ ‘16.  9. : CCTV 설치(20개소), 태양광발전 설비 설치(5개소) 완료

ㅇ ‘16. 12. : 한뜰문화 교류센터 내부공사 계속

〈상남권역단위 종합정비사업〉

ㅇ ‘13. 11. : 주민공청회 및 발전협의회 개최, 도 기본계획 협의, 기본계획수립 및 고시

ㅇ ‘14. 10. : 기본계획변경수립을 위한 주민설명회 개최

ㅇ ‘14. 11. : 기본계획변경수립 및 고시, 시행계획수립 및 고시

ㅇ ‘15.  1. : 공사 착공

ㅇ ‘16. 12. : 용소유원지 조성(와룡교류센터 건립) 및 보상협의 추진

〈정동권역단위 종합정비사업〉

ㅇ ‘15.  4. : 기본계획수립 용역 착수

ㅇ ‘16. 12. : 기본계획수립 협의

□ 향후 추진계획

〈용현권역단위 종합정비사업〉

ㅇ  ‘17. 12.  : 공사 준공 예정

〈상남권역단위 종합정비사업〉

ㅇ  ‘17.  1.  : 용소 숲 등 정비(데크 및 체육시설 설치, 주차장 설치 등)

ㅇ  ‘17. 12.  : 공사 준공 예정

〈정동권역단위 종합정비사업〉

ㅇ  ‘17.  1.  : 시행계획수립 착수

ㅇ  ‘17.  7.  : 시행계획 수립․승인

ㅇ  ‘17. 10.  : 공사 착공

□ 문제점 및 대책

ㅇ 사업추진구역 보상협의 지연

ㅇ 성실한 보상협의 절차 준수