어촌마을 정비사업(송포마을권역종합정비사업)

관리번호		4 - 2		주관부서		지역개발과(농촌개발담당)
임기구분		사업구분		예산구분		추진현황					이행률 (%)
임기내	중장기	신규	계속	예산	비예산	완료		추진중		미착수
						종료	지속추진	정상	부진
○			○	○				○			30

ㅇ 마을의 경관개선, 생활환경정비 및 주민소득기반 확충 등을 통한 도시민의

인구유입 및 지역별 특색 있는 발전도모

□ 사업개요

ㅇ 위    치 : 사천시 대방동, 실안동 일원

ㅇ 사업기간 : 2014년 ~ 2018년

ㅇ 사 업 량 : 마을권역종합정비 1개 권역

ㅇ 사 업 비 : 3,498백만원(국 2,362, 도 304, 시 708, 자담 124)

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년 (임기내)	2019이후 (임기후)
계	3,498	347	430	1,060	1,310	-	-
국 비 도 비 시 비 민자등	2,362 304 708 124	243 31 73 -	301 39 90 -	700 90 210 60	1,118 144 335 64	- - - -	- - - -

□ 연도별 달성목표

단위사업	완료목표	2014	2015	2016	2017	2018	2018이후
추진율(누계)	100%	5%	10%	30%	60%	100%	%
송포마을 권역단위종합정비사업		기본계획	기본계획	시행계획	공사	공사 및 준공

□ 추진실적

ㅇ ‘14.  6. : 위․수탁 계약체결 사업시행

ㅇ ‘14.  8. : 기본계획수립 용역 실시

ㅇ ‘15.  8. : 기본계획수립 확정 협의(승인) ⇒ 경남도

ㅇ ‘16. 12. : 시행계획 승인 협의 중, 사무장 채용 추진

□ 향후 추진계획

ㅇ ‘17.  1. : 시행계획 승인 완료

ㅇ ‘17.  2. : 공사 착공

ㅇ ‘17. 12. : 공사 준공

□ 문제점 및 대책

ㅇ  사업대상 마을주민 소극적 참여로 사업추진 애로

→ 마을주민이 원하는 사업을 적극 발굴 선정하여 참여 유도

→ 지역역량강화 교육을 통한 마을주민의 참여도 제고

ㅇ  권역사무장 채용 공고에 대한 지원자 無

→ 사무장 채용 재 공고(2016. 12) 및 홍보 강화를 통한 우수사무장 채용