농산물유통체계혁신

(농산물종합가공센터 설치)

관리번호		4-15(2)		주관부서		미래농업과(생활자원담당)
임기구분		사업구분		예산구분		추진현황					이행률 (%)
임기내	중장기	신규	계속	예산	비예산	완료		추진중		미착수
						종료	지속추진	정상	부진
○		○		○				○			60%

○ 농업기술센터를 지역농산물 가공기술의 전진기지화

○ 농산물 가공 희망농가의 수요에 맞는 품목·장비 선정으로 상시운영 체계 확립

○ 개인별 가공사업장 설비투자 없이도 생산한 농산물 직접 가공 판매할 수        있는 가공센터 설치로 효율성 증대

○ 농산물 가공기술의 이전, 보급, 확산을 통한 농외소득 창출 지원

□ 사업개요

ㅇ  위    치 : 농업기술센터 내(용현면 신복리 산75-2)

ㅇ  사업기간 : 2015 ~ 2018

ㅇ  사 업 량 : 1개소

ㅇ  사업내용 : 농산물가공센터 신축(330㎡), 가공설비 구축

ㅇ  사 업 비 : 1,427백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년 (임기내)	2018이후 (임기후)
계	1,427		500	800	27	50	50
국 비 도 비 시 비 민자등	100 450 850		150 350	100 300 400	27	50	50

□ 연도별 달성목표

단위사업	완료목표	2014	2015	2016	2017	2018	2018이후
추진율(누계)	100%	%	20%	60%	95%	100%	%
농산물종합가공센터 설치			계획수립 행정절차이행	실시설계 및 착공	준공 및 시제품생산	운영

□ 추진실적

ㅇ 기 설치 지역 현장 벤치마킹 : 2015. 1.(완주군, 군산시)

ㅇ 2015년 농산물종합가공센터 설치 추진 계획 : 2015. 1.

ㅇ 사천시농산물종합가공센터 설치 기본조사 용역완료 : 2015. 6.

ㅇ 도시계획시설결정(변경) 용역 완료 및 승인 : 2015. 12.

ㅇ 농산물가공 전문인력 양성교육 : ‘14. 10 ~ ‘16. 8, 230명

- 14년 : 1과정 40명 / 15년 : 2과정 70명 / 16년 : 3과정(가공기초, 창업기초) 120명

ㅇ 농산물가공센터 부지 내 무연분묘 개장 완료 : 2016. 8

ㅇ 농산물가공센터 공정설계 완료 : 2016. 8

ㅇ 농산물가공센터 건축공사 토목·건축 실시 설계용역 완료 : 2016. 8.

ㅇ 농산물가공센터 건축공사 도 계약심사 의뢰 : 2016. 9.

ㅇ 농산물가공센터 건축공사 착공 : 2016. 11.

ㅇ 사천시 농특산물을 이용한 가공식품 개발용역 완료 : 2016. 5. ~ 12.

ㅇ 농산물종합가공센터 브랜드 및 포장디자인 개발용역 완료 : 2016. 9. ~ 12.

- 투자실적 : 95.9백만원

- 총 공정률(%) : 60%

□ 향후 추진계획

ㅇ 농산물종합가공센터 건립공사 준공 : 2017. 5.

ㅇ 가공기계 및 가공장비 구축 : 2017. 6.

ㅇ 농산물종합가공센터 운영 조례 재정 : 2017. 6.

ㅇ 농업인 조직체 구성 : 2017. 6.

ㅇ 가공기계 이용 가공품 생산교육 및 시제품 생산 : 2017. 12.

□ 문제점 및 대책

ㅇ 향후 사업의 원활한 운영을 위한 지속적인 예산 및 인력 확보 필요