사천시청 직장어린이집 설치 운영

관리번호		5-5		주관부서		행정과(후생담당)
임기구분		사업구분		예산구분		추진현황					이행률 (%)
임기내	중장기	신규	계속	예산	비예산	완료		추진중		미착수
						종료	지속추진	정상	부진
○		○		○				○			20

ㅇ 자녀를 둔 직원들이 업무에 전념할 수 있도록 자녀보육 여건 조성

□ 사업개요

ㅇ  위    치 : 사천시 용현면 시청로 77(사천시청 필로티층)

ㅇ  사업기간 : 2014. 8. ～ 2017. 12.

ㅇ  사 업 량 : 시설규모 338.1㎡(1인당 6.9㎡, 보육정원 50명 미만)

ㅇ  사 업 비 : 1,627백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년 (임기내)	2018이후 (임기후)
계	1,627		300	1,327
국 비 도 비 시 비 민자등	1,627		300	1,327

□ 연도별 달성목표

단위사업	완료목표	2014	2015	2016	2017	2018	2018이후
추진율(누계)	100%	5%	5%	20%	100%	%	%
사천시청 직장어린이집 설치 운영	100%	계획수립	계획수립	실시설계	공사

□ 추진실적

◦ 2014. 08. : 사천시청 직장어린이집 설치계획 방침

◦ 2015. 08. : 사천시청 직장어린이집 설치(변경)계획 방침

※ 위치 : 용현면 시청로 77(행정동 필로티층 2개층 증축)

◦ 2015. 09. : 행정동 필로티층 증축을 위한 건축 디자인 공모

◦ 2016. 11. : 공유재산관리계획안 시의회 의결

◦ 2016. 07. ～ 2017. 1. : 설계용역 중

□ 향후 추진계획

◦ 2017. 03. : 공사 착공

◦ 2017. 04. ~ 10. : 조례 제정 등 개원 준비

◦ 2017. 11. : 공사 준공 및 시설 인가

◦ 2018. 01. : 개원

□ 문제점 및 대책

ㅇ 해당사항 없음