테마형 힐링 아일랜드 개발

관리번호		6-13		주관부서		지역개발과 (개발지원담당)
임기구분		사업구분		예산구분		추진현황					이행률 (%)
임기내	중장기	신규	계속	예산	비예산	완료		추진중		미착수
						종료	지속추진	정상	부진
○			○	○				○			70

ㅇ 자연환경 활용으로 사계절 생태관광 섬으로 육성

ㅇ 종합관광 휴양섬 개발로 주민소득 창출 및 지역경제 활성화기초

ㅇ 생활기반 확충으로 도서민 정착의욕 고취

□ 사업개요

ㅇ  위    치 : 사천시 동서동, 서포면일원

ㅇ  사업기간 : 2014년~2017년

ㅇ  사 업 량 : 도서종합개발 6개소

ㅇ  사 업 비 : 19,877백만원(국비 15,762, 도비 1,987.5, 시비 2,127.5)

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년 (임기내)	2019이후 (임기후)
계	19,877	13,930	3,470	1,409	1,068	-	-
국 비 도 비 시 비 민자등	15,762 1,987.5 2127.5 -	11,040 1,375 1,515 -	2,740 365 365 -	1,128 140.5 140.5 -	854 107 107 -

□ 연도별 달성목표

단위사업	완료목표	2014	2015	2016	2017	2018	2018이후
추진율(누계)	100%	5%	30%	70%	90%	100%	%
테마형 힐링아일랜드 개발		기본계획	기본계획+시행계획	시행계획+공사	공사	공사 및 준공	-

□ 추진실적

ㅇ 2014. 10 : 신도생태체험마을 전망대 조성공사 준공

ㅇ 2015. 07 : 도서종합계획 일부변경 승인(힐링공간조성 추가)

ㅇ 2015. 09 : 신수도 외 2(마도,신도,저도) 테마형 힐링공간조성 학술용역 시행

ㅇ 2015. 11 : 월등도,진도 진입로 개설공사 총괄(1+2공구)준공

ㅇ 2015. 12 : 하수처리시설(마도, 저도) 설치공사 준공

ㅇ 2016. 01 : 하수처리시설(신도) 설치공사 준공

ㅇ 2016. 08 : 마도 찾아가고 싶은섬 조성사업(2016년분) 준공

ㅇ 2016. 08 : 마도 찾아가고 싶은섬 조성사업 방문자센터 신축공사 준공

ㅇ 2016. 09 : 신도 생태체험마을조성 기반시설 설치공사 준공

ㅇ 2016. 12 : 신도 생태체험마을조성 방문자센터 신축공사 준공

□ 향후 추진계획

ㅇ 2017. 01 : 마도 찾아가고 싶은섬 조성사업(2016년 2차분) 준공 예정

ㅇ 2017. 01 : 신수도섬일주 도보길 조성사업 시행

ㅇ 2017. 01 : 늑도 관광기반시설 확충 대체사업 발굴 승인 신청

ㅇ 2017. 03 : 신도 생태체험마을조성(마을회관 리모델링) 사업 착수

ㅇ 2017. 06 : 지역역량강화 사업 준공 예정

ㅇ 2017. 07 : 신수도 바다마을 쉼터조성사업 준공 예정

□ 문제점 및 대책

ㅇ 사업완료 후 주민의 복지증진, 소득증대, 체험시설 등에 관한 시설물에 대한   관리방법 등 사후관리 미비

☞ 수지분석 및 조례제정 등 관련 근거를 마련하여 시설물 위·수탁 시행