생활체육시설 확충

관리번호		7 - 3		주관부서		체육지원과(체육시설담당)
임기구분		사업구분		예산구분		추진현황					이행률 (%)
임기내	중장기	신규	계속	예산	비예산	완료		추진중		미착수
						종료	지속추진	정상	부진
	○		○	○				○			40

ㅇ 시민들의 건강 증진 및 삶의 질 향상을 위한 생활체육시설 공간 조성

□ 사업개요

ㅇ  위    치 : 용현, 곤양, 곤명, 정동 생활체육시설 조성

ㅇ  사업기간 : 2015년 ~ 2020년(6년간)

ㅇ  사 업 량 : 축구장, 테니스장, 족구장 등 조성

ㅇ  사 업 비 : 13,300백만원(국비 1,840, 도비 600, 시비 10,860)

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년 (임기내)	2018이후 (임기후)
계	13,300	1,250	650	1,900	1,500	2,900	5,100
국 비 도 비 시 비 민자등	1,840 600 10,860 -	350 - 900 -	90 - 560 -	400 - 1,500 -	- - 1,500 -	500 300 2,100 -	500 300 4,300 -

□ 연도별 달성목표

단위사업	완료목표	2014	2015	2016	2017	2018	2018이후
추진율(누계)	100%	5%	10%	20%	40%	60%	100%
생활체육시설 조성	6개 지역	·용현 입지 선정 등, ·곤양,정동 계획수립	·용현,곤양,정동 사남족구장, 삼천포테니스장 행정절차이행 ·곤명토목준공	·용현 행정절차이행 ·곤양·정동설계 및 공사 추진 ·곤명건축준공	·용현실시설계 ·곤양,정동준공	·용현 보상 및 공사	·용현 공사 및 준공

□ 추진실적

ㅇ 용현 생활체육시설 조성

‣ 총 사업비 : 8,500백만원(국비 1,000, 도비 600, 시비 6,900)

‣ 총 공정률(%) : 15%(행정절차 이행 중)

- ‘13. 10~12월 : 후보지 주민설명회 개최(3회) 부지위치 결정

- ‘13. 12. 18. : 체육시설 입지 확정

- ‘14. 10. 21. : 시 공유재산심의회(원안가결)

- ‘15. 03. 11. : 지방재정 투융자심사(도심사) 조건부 가결

ㅇ 곤양 생활체육시설 조성

‣ 총 사업비 : 2,700백만원(국비 350, 시비 2,350)

‣ 총 공정률(%) : 50%(체육시설 부지 조성 중)

- ‘13. 10월   : 공유재산심의회 가결 및 관리계획 반영

- ‘13. 11. 07. : 지방재정 투융자 심사 완료

- ‘15. 01. 07. : 농업진흥구역 해제 행정절차 완료

- ‘15. 03. 11. : 지방재정 투융자심사(도심사) 조건부 가결

- ‘16. 07. 27. : 공사 착공

ㅇ 정동 생활체육시설 조성

‣ 총 사업비 : 1,800백만원(국비 400, 시비 1,400)

‣ 총 공정률(%) : 40%(축구장 부지 조성 중)

- ‘15. 04. 23. : 공유재산심의회 가결

- ‘15. 06. 25. : 도시계획위원회 심의

- ‘15. 12월   : 도시관리계획 결정 및 실시계획 인가

- ‘16. 09. 06. : 공사 착공

ㅇ 곤명 생활체육시설 조성

‣ 총 사업비 : 300백만원(국비 90, 시비 210)

‣ 총 공정률(%) : 100%

- ‘15. 5~12월 : 토목부분 준공(테니스장 1면)

- ‘16. 6~08월 : 건축부분 준공(화장실, 게이트볼장 정비)

ㅇ 사남 족구장 조성

‣ 총 사업비 : 200백만원(시비 200)

‣ 총 공정률(%) : 100%

- ‘16. 05월 : 공사 준공

ㅇ 삼천포 테니스장 조성

‣ 총 사업비 : 50백만원(시비 50)

‣ 총 공정률(%) : 100%

- ‘16. 05월 : 공사 준공

□ 향후 추진계획

ㅇ 용현 생활체육시설 조성

- ‘17. 06월   : 도시계획시설 결정

- ‘17. 7~’18. 6월 : 실시설계용역 및 보상

- ‘18. 07월   : 공사 착공(보상병행)

- ’20. 12월   : 공사 준공

ㅇ 곤양 생활체육시설 조성

- ‘17. 01월   : 체육시설 부지조성 완료(1차분 준공 및 2차분 발주)

- ‘17. 05. 26. : 공사 완료(총괄분 및 2차분 준공)

ㅇ 정동 생활체육시설 조성

- ‘17. 09. 05 : 공사 완료