송포 만남의 광장 공원 조성

관리번호		7 - 4		주관부서		도시과 (도시계획담당)
임기구분		사업구분		예산구분		추진현황					이행률 (%)
임기내	중장기	신규	계속	예산	비예산	완료		추진중		미착수
						종료	지속추진	정상	부진
○		○		○				○			10

ㅇ 동(삼천포)지역 주민들의 만남의 광장 조성

ㅇ 동 지역 관문에 시민 소통 공간 및 방문객 편의시설 필요

□ 사업개요

ㅇ  위    치 : 사천시 노룡동 산8-1번지 일원

ㅇ  사업기간 : 2015. ~ 2018.

ㅇ  사 업 량 : 만남의광장 조성 A=13,800㎡

ㅇ  사 업 비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년 (임기내)	2018이후 (임기후)
계	5,000	-	100		500	4,400
국 비 도 비 시 비 민자등	5,000		100		500	4,400

□ 연도별 달성목표

단위사업	완료목표	2014	2015	2016	2017	2018	2018이후
추진율(누계)	100%	%	2%	10%	12%	100%	%
송포 만남의 광장 공원 조성		-	계획수립 실시설계	실시설계 공원조성계획	보상	보상, 공사

□ 추진실적

ㅇ ‘12. 05. : 공원 조성계획 수립

ㅇ ‘14. 10. : 중기재정계획, 투자심사

ㅇ ‘15. 02. : 만남의 광장 조성 용역 시행

ㅇ ‘15. 03. : 노대공원 조성계획 및 실시설계 용역 착수

ㅇ ‘15. 10. : 실시설계용역 보고회 개최

ㅇ ‘16. 03. : 제1회 도시계획위원회 자문 (진·출입시설 교통성 검토)

ㅇ ‘16. 11. : 도시계획시설(노대공원) 조성계획 변경

- 투 자 실 적 : 100백만원(시비)

- 총 공정률(%) : 2%

□ 향후 추진계획

ㅇ ‘17. 01~ : 보상협의