용현 항공특화단지 조성 추진

관리번호		2- 9		주관부서		우주항공과(우주항공지원담당)
임기구분		사업구분		예산구분		추진현황					이행률 (%)
임기내	중장기	신규	계속	예산	비예산	완료		추진중		미착수
						종료	지속추진	정상	부진
○		○		○				○			50

◦ 기 조성된 사천 제1·2일반산업단지와 종포일반산업단지 인근 지역에 항공특화 일반산업단지를 조성하여 관내 항공기업체의 시급한 용지난 해소

◦ 항공산업의 기술개발 및 생산성 고도화를 위한 인프라 구축으로 항공산업체 경영환경 개선

□ 사업개요

◦ 위    치 : 사천시 용현면 종포일반산업단지, 사천항공전용 임대단지

◦ 사업기간 : 2014년 11월 ~ 2019년 10월

◦ 사 업 량 : 769천㎡

◦ 사 업 비 : 472억원(국비250, 도비40, 시비112, 민자70)

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	임기내					2018년이후 (임기후)
			소계	2015년	2016년	2017년	2018년
계	47,200	1,000	39,100	6,000	15,700	11,100	11,500	1,900
국 비	25,000		21,200	2,000	6,500	9,100	5,500	1,900
도 비	4,000		4,000			2,000	2,000
시 비	11,200		8,000		7,200		4,000
민자 등	7,000	1,000	5,900	4,000	2,000

□ 연도별 달성목표

단위사업	완료목표	2014	2015	2016	2017	2018	2018이후
추진율(누계)	100%	%	10%	20%	60%	80%	100%
용현 항공특화단지 조성			표면처리시설 구축업체 선정	표면처리시설 착공	물류센터 계획수립	물류센터 구축	준공

□ 추진실적

◦‘14. 07. 28. : 항공산업 특화단지 지정 신청(산업통상자원부)

◦‘14. 08. 07. : 항공산업 특화단지 지정(산업통상자원부)

◦‘14. 12. 24. : 항공산업 특화단지지원사업 전자협약 체결(1단계)

◦‘15. 04. 27. : 표면처리시설 건축설계 업체 선정

◦‘15. 05. 28. : 표면처리시설 구축 적격업체 선정 평가위 개최

◦‘15. 06. 30. : 표면처리시설 구축 업체 선정(로터스 엔지니어링)

◦‘16. 05. 11. : 표면처리시설 착공

◦‘16. 05. ~ 09. : 항공 물류센터 수요파악을 위한 설문 조사

◦‘16. 12. : 항공 물류센터 구축사업 기본계획 수립

◦‘16. 12. : 3차 년도 사업 착수

◦‘17. 03. : 표면처리공장 준공

□ 향후 추진계획

◦‘17. 06. : 항공기 시험평가 인프라 구축사업 추진

◦‘17. 07. : 항공 물류센터 구축사업 착공(공장동)

◦‘17. 12. : 4차 년도 사업 착수

□ 문제점 및 대책

◦ 종포일반산업단지 조성 정상 추진