삼천포항 낚시정보 종합회관 조성

관리번호		6 - 10		주관부서		해양수산과 (어업지도담당)
임기구분		사업구분		예산구분		추진현황					이행률 (%)
임기내	중장기	신규	계속	예산	비예산	완료		추진중		미착수
						종료	지속추진	정상	부진
○		○		○				○			20

ㅇ 추진배경(필요성)

- 주 5일제 근무 및 국민여가 생활 향상으로 낚시레저 관광객 급증

- 낚시 레저객들의 휴식 공간 및 정보교환 장소 제공으로 레저관광산업 활성화

도모 및 해양관광 도시 이미지 제고

□ 사업개요

ㅇ  위    치 : 사천시 동금동 158-54번지(삼천포항 팔포어항구 내)

ㅇ  사업기간 : 2016년 ~ 2017년

ㅇ  사 업 량 : 낚시정보종합회관 건축(2층 500㎡) 및 부잔교 시설

ㅇ  사 업 비 : 1,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년 (임기내)	2018이후 (임기후)
계	1,800	-	-	300	1,500	-	-
국 비 도 비 시 비 민자등	- - 1,800 -	- - - -	- - - -	- - 300 -	- - 1,500 -	- - - -	- - - -

□ 연도별 달성목표

단위사업	완료목표	2014	2015	2016	2017	2018	2018이후
추진율(누계)	100%	0%	0%	20%	100%	0%	0%
삼천포항 낚시정보 종합회관	100%	-	-	낚시어선 부잔교설치	낚시정보회관 착공 및 준공	-	-

□ 추진실적

ㅇ  2014. 09. : 낚시어선업자(자율관리공동체 회원) 의견수렴(찬반양론 비등)

ㅇ  2015. 01. : 실시설계비 예산확보 (2015 당초예산, 시비 30백만원)

ㅇ  2015. 02. : 사업예정지 선정관련 낚시동호인 의견수렴

ㅇ  2015. 04. : 어업인, 해당어촌계 의견 수렴

ㅇ  2015. 04. : 낚시회관 건립사업비 경남도 및 해양수산부 예산계상 신청

(국비 10억, 도비 4억, 시비 4억)

ㅇ  2015. 05. ~ 08. : 국비 예산확보위해 해양수산부 방문 건의(3차)

ㅇ  2015. 05. : 삼천포항 관리청(경상남도 항만물류과)과 부지사용 가협의

ㅇ  2015. 08. 11. : 공유재산심의회 심의결정

ㅇ  2015. 09. 15. : 시의회 임시회 공유재산관리계획 안 부결(시 재정 여건 상 시기상조로 부결)

ㅇ  2015. 09. 21. : 삼천포항 낚시정보회관 건립관련 검토보고(삼천포항다목적회관 활용 방안)

ㅇ  2016. 05. 04. : 시장 현장순시 시 낚시어선협회 회원 면담

- 낚시정보회관 필요성과 부잔교 설치 건의로 낚시정보회관 건립 재추진

ㅇ  2016. 05. 11. : 낚시레저 활성화관련 현안사항 처리계획 보고

- 낚시정보회관 건립 재추진, 부잔교 설치 예산편성(2016년 1회 추경 300백만원)

- 낚시어선 부잔교 설치 추진 중 : 3개소(공정률(%) : 20%)

ㅇ  2016. 8.26. : 낚시회관 건립사업비 지원 경남도 방문 건의

ㅇ  2016. 9.28. : 2016년 제4회 공유재산심의회 의결

ㅇ  2016.11.10. : 2017년 공유재산관리계획안 의결(제206회 사천시의회 임시회)

ㅇ  2016.12. 5. : 2017년 예산제안설명(시의회)

ㅇ  2016.12.~2017.3.15. : 삼천포항 낚시정보회관 건립위치 협의(10회)

ㅇ  2017.2.3./3.10. : 삼천포항 낚시정보회관 건립부지 사용허가 협의(경남도 2회)

ㅇ  2017.2.14./2.28. : 삼천포항 낚시정보회관 건립부지 현지실사(경남도 2회)

□ 향후 추진계획

ㅇ 건립부지 사용협의 : 비관리청 항만공사 시행허가 사전협의 중

ㅇ 추진계획

- 2017. 01. ~ 06. : 기본조사 및 실시설계

- 2017. 06. : 비관리청 항만공사 시행허가(경남도 항만물류과)

- 2017. 07. ~ 12. : 착공 및 준공(예정)