자연친화적 근린공원 조성

관리번호		7 - 8		주관부서		녹지공원과 (공원담당)
임기구분		사업구분		예산구분		추진현황					이행률 (%)
임기내	중장기	신규	계속	예산	비예산	완료		추진중		미착수
						종료	지속추진	정상	부진
	◯		◯	◯				◯			21

ㅇ 쾌적한 공원환경 조성ㆍ관리로 이용객 편의제공 및 시민의 삶의 질 향상

□ 사업개요

ㅇ  위    치 : 성내공원 외 10개소

ㅇ  사업기간 : 2015 ~ 2018

ㅇ  사 업 량 : 11개소 1,484㎡

ㅇ  사 업 비 : 11,000백만원(국비 1,000  도비 60,  시비 4,940  민간 5,000)

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년 (임기내)	2018이후 (임기후)
계	11,000	1,700	100	500	2,800	2,300	3,600
국 비 도 비 시 비 민자등	1,000 60 4,940 5,000	1,700	100	200 60 240	300 500 2,000	300 1,000 1,000	200 1,400 2,000

□ 연도별 달성목표

단위사업	완료목표	2014	2015	2016	2017	2018	2018이후
추진율(누계)	100%	16%	17%	21%	47%	68%	100%
자연친화적 근린공원 조성	100%	부지매입 및 공원조성	부지매입 및 공원조성	부지매입 및 공원조성	부지매입 및 공원조성	부지매입 및 공원조성	부지매입 및 공원조성

□ 추진실적

ㅇ 기투자실적 : 2,300백만원

ㅇ '16. 투자실적 : 500백만원(국비 200 도비 60 시비 240 민자 등)

- 성내공원 : 생활환경숲 조성 및 부지매입 450백만원

- 모충공원 : 부지매입 50백만원

ㅇ 총 공정률(%) : 21%

□ 향후 추진계획

ㅇ 2018년 이후 : 성내공원 등 부지매입 및 공원조성 8,700백만원

□ 문제점 및 대책

ㅇ 보조금 지원사업이 없어 자체예산만으로 사업추진 한계

ㅇ 중앙기관ㆍ산림청 등 국ㆍ도비가 지원될 수 있도록 지속적인 노력(공모사업 등)