항공 R&D 센터 건립

관리번호		2 - 1		주관부서		우주항공과(우주항공산업담당)
임기구분		사업구분		예산구분		추진현황					이행률 (%)
임기내	중장기	신규	계속	예산	비예산	완료		추진중		미착수
						종료	지속추진	정상	부진
	○	○		○				○			15

◦ 글로벌 항공 복합재 시장진입 확대를 위한 시험평가분석시스템 구축

◦ 복합재 시편 제작 및 품질보증시스템 확보

◦ 항공 복합소재 실용개발을 위한 전주기 지원시스템 기반 마련

□ 사업개요

◦ 사 업 명 : 항공기 복합소재 시험평가분석시스템 구축

◦ 위    치 : 사천시 사남면 경남테크노파크(항공우주센터)

◦ 사업기간 : 2017년 ~ 2019년(3년)

◦ 사 업 량 : 장비 및 시설 구축, 복합재 물성치 확보, 인증시스템 구축 등

◦ 사 업 비(계획) : 255억원(국비100, 지방비155)

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	임기내					2018이후 (임기후)
			소계	2015년	2016년	2017년	2018년
계	25,500		7,550				7,550	17,950
국 비	10,000		2,000				2,000	8,000
지방비	15,500		5,550				5,550	9,950
민자등

□ 연도별 달성목표

단위사업	완료목표	2014	2015	2016	2017	2018	2018이후
추진율(누계)	100%	%	%	%	%	30%	70%
항공 R&D센터 건립						건축 설계 및 착공 장비구축	건축 준공 장비구축, 공정승인

□ 추진실적

◦‘13. 07. ~‘13. 08. : 중소기업체 수요(필요성) 제기

◦‘13. 08. : 타당성 조사를 위한 용역 예산반영 건의

◦‘14. 01. ~‘14. 04. : 중복 방지를 위한 타 지역 조사 및 업무 협의

◦‘14. 05. ~‘14. 07. : 기획위원회 구성 및 운영

◦‘14. 11. ~‘15. 09. : 타당성 연구용역 수행(산업연구원)

◦‘15. 08. ~‘15. 09. : 산업부(자동차항공과) 신규사업 반영 협의

◦‘16. 01. ~‘16. 03. : 신규신청 사업 내용 설명(산업부)

◦‘16. 03. : 규제프리존 재정지원사업 제출

◦‘16. 06. ~‘16. 07. : 기획재정부 예산심의(산업부 ‘17년 국비 20억 반영요구)

◦‘17. 04. ~‘17. 06. : 4차 산업혁명대비 경남전략산업 기본계획 사업 반영

◦‘17. 05. : 경남도 대통령 지역공약 국정과제 채택건의서 반영

□ 향후 추진계획

◦‘18. 06 : 세부사업 실행계획 수립 및 협약체결

◦‘18. 06 ~‘18. 08 : 연구동 및 시험지원동 구축 설계용역

◦‘18. 09 ~‘19. 12 : 연구동 및 시험지원동 건립

◦‘18. 09 ~‘21. 05 : 시험평가분석 장비 구축

◦‘18. 12 ~‘21. 05 : 항공기 복합재 부품 인증시스템 구축

◦‘19. 06 ~ : 항공우주용 복합소재 물성치 DB 구축

◦‘21. 03 ~ : 경남 도내 업체 지원 및 구축 완료

□ 기대효과

◦ 국내 생산 763억원, 부가가치 268억원, 고용창출 558명 예상

◦ 정부(국방) 인증 및 해외 복합재 부품 수요 충족

- KF-X*, LAH**, LCH*** 및 해외 항공사(Boeing, Airbus 등)

* KFX 개발기간 : ’15년 12월 ~ ’26년 6월(한국형 전투기 개발사업, Korean Fighter eXperimental)

** LAH 개발기간 : ’15년 ~ ’22년(소형무장헬기, Light Armed Helicopter)

*** LCH 개발기간 : ’15년 ~ ’22년(소형민수헬기, Light Civil Helicopter)

□ 문제점 및 대책

◦ 20대 국회 2016년 5월 제출된 규제프리존특별법 국회 계류 중

◦ (정부동향) 기획재정부 장관 규제프리존특별법 통과 촉구(12/14), 국회 기획재정위원회 법안소위 개최(12/21)