전통시장 재생 프로젝트

관리번호		2 - 4		주관부서		투자유치과(지역경제담당)
임기구분		사업구분		예산구분		추진현황					이행률 (%)
임기내	중장기	신규	계속	예산	비예산	완료		추진중		미착수
						종료	지속추진	정상	부진
○			○	○				○			80

ㅇ 전통시장 경쟁력 제고 및 지역경제 활성화 기여

ㅇ 상업기반 시설현대화 추진 및 고객편의 시설 설치

□ 사업개요

ㅇ 위    치 : 사천시 관내

ㅇ 사업기간 : 2014년 ~ 2017년

ㅇ 사 업 량 : 전통시장 7개소

ㅇ 사 업 비 : 38,897백만원(국 19,799, 도 700, 시 17,998, 민자 400)

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자 07∼14	2015년	2016년	2017년	2018년 (임기내)	2018이후 (임기후)
계	38,897	24,720	3,000	5,367	5,810
국 비 도 비 시 비 민자등	19,799 700 17,998 400	12,670 700 10,950 400	1,760 1,240	2,730 2,637	2,639 3,171

□ 연도별 달성목표

단위사업	완료목표	2014	2015	2016	2017	2018	2018이후
추진율(누계)	100%	20%	50%	80%	90%	100%	100%
시설현대화사업		사업추진 1개소	사업추진 1개소	사업추진 7개소	사업추진 7개소	사업추진 7개소	사업추진 7개소

□ 추진실적

ㅇ 2014.  5월 : 2015년 전통시장 시설현대화사업 확정

ㅇ 2014. 11월 : 곤양종합시장 도색 및 화장실 보수공사 완료

ㅇ 2015.  3월 : 2015년도 전통시장 주차장조성사업 선정

ㅇ 2015.  5월 : 완사시장 노후천막 교체

ㅇ 2015. 10월 : 2016년 전통시장 시설현대화사업 선정(2개 시장)

ㅇ 2016.  3월 : 2016년 전통시장 주차환경개선사업 선정

ㅇ 2016.  3월 : 삼천포 전통수산시장 비가림시설 설치

ㅇ 2016.  3월 : 삼천포중앙시장 해수인입시설 설치공사

ㅇ 2016.  4월 : 곤양종합시장 비가림시설 설치공사

ㅇ 2016.  5월 : 사천읍시장 LED설치공사

ㅇ 2016.  6월 : 삼천포용궁수산시장 버스주차장 조성(10면)

ㅇ 2016.  8월 : 서포시장 캐노피설치공사

ㅇ 2016.  9월 : 삼천포중앙시장 환경개선사업 소방공사

ㅇ 2016. 10월 : 2017년 전통시장 시설현대화사업 선정 : 4개시장 6개사업

ㅇ 2016. 11월 : 삼천포종합시장 화장실보수공사

ㅇ 2016. 11월 ~ 12월 : 삼천포중앙시장 환경개선사업 완료

ㅇ 2016. 12월 : 삼천포용궁수산시장 버스주차장 토지 등 보상

ㅇ 2017.  1월 : 2017년 전통시장 주차환경개선사업 신청

ㅇ 2017.  2월 : 2018년 전통시장 시설현대화사업 신청

ㅇ 2017.  3월 : 2017년 전통시장 주차환경개선사업 선정(삼천포용궁수산시장)

ㅇ 2017.  3월 ~ : 삼천포용궁수산시장 버스주차장 조성사업 보상협의

ㅇ 2017.  4월 : 2018년도 전통시장 시설현대화사업 사업 현장평가

ㅇ 2017.  5월 : 삼천포전통수산시장 노면정비외 1개소 정비공사 시행

ㅇ 2017.  6월 : 완사시장 간판설치공사

ㅇ 2017.  6월 : 삼천포용궁수산시장 CCTV 설치공사

□ 향후 추진계획

ㅇ 2017.  7월 ~ : 삼천포용궁수산시장 버스주차장 부지조성

ㅇ 2017.  7월 : 삼천포종합시장 전기시설보수공사 시행

ㅇ 2017.  8월 : 삼천포용궁수산시장 환풍시설 설치공사 시행

ㅇ 2017. 10월 ~ : 2018년도 전통시장 시설현대화사업 사업 선정통보