사천 종포일반산업단지 조성

관리번호		2 - 10		주관부서		우주항공과(우주항공지원담당)
임기구분		사업구분		예산구분		추진현황					이행률 (%)
임기내	중장기	신규	계속	예산	비예산	완료		추진중		미착수
						종료	지속추진	정상	부진
○			○	○			○				98

◦ 사천시를 항공산업의 중심도시로 육성하고 항공산업 클러스트 구축

◦ 사천시의 미래를 책임질 성장동력기반 마련 및 경제 활성화

□ 사업개요

◦ 위    치 : 사천시 용현면 신촌리 432-24번지 일원

◦ 사업기간 : 2014년 ~ 2017년

◦ 사 업 량 : 산업단지조성 1식 A=376,125㎡

◦ 사 업 비 : 630억원

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	임기내					2018년이후 (임기후)
			소계	2015년	2016년	2017년	2018년
계	63,000	44,000	19,000		12,300	6,700
국 비 도 비 시 비 지방채등	63,000	44,000	19,000		12,300	6,700

□ 연도별 달성목표

단위사업	완료목표	2014	2015	2016	2017	2018	2018이후
추진율(누계)	100%	10%	40%	90%	100%	%	%
사천 종포일반산업단지 조성		승인・고시	보상・공사	공사	준공

□ 추진실적

◦ ‘13. 08. 22 : 투자의향서 타당성검토 결과통보(경남도→사천시)

◦ ‘13. 11. 04 : 산업단지지정 승인 신청(종포산단→경상남도)

◦ ‘13. 12.    : 중기지방재정계획

◦ ‘14. 01. 08 : 지방재정 투․융자 심사(안전행정부)

◦ ‘14. 04. 24 : 산업단지 승인 고시(경상남도)

◦ ‘14. 05. 29 : 사업시행자 변경 고시 : 종포산단개발(주)→사천시

◦ ‘14. 10. 02 : 폐수처리관리기본계획 변경 승인(낙동강유역환경청)

◦ ‘14. 11. 24 : 착공(디에치건설, 동원건설산업, 서우건영)

◦ ‘14. 12. 23 : 기공식

◦ ‘15. 01. 27 : 경상남도지방토지수용위원회 개최

◦ ‘15. 06. 18 : 종포일반산업단지 계획(변경) 심의위원회 개최

◦ ‘15. 07. 30 : 종포일반산업단지 계획(변경) 승인·고시

◦ ‘16. 01. ~ ‘17. 2. : 종포산단 분양(산업시설 11필지 253,306㎡, 지원시설 1필지 13,563㎡)

◦ ‘17. 06. : 산업단지 조성공사 준공

□ 향후 추진계획

◦ ‘17. 06. ~ : 국가산단 승인에 따른 연접지역 개발계획 협의

◦ ‘17. 12. : 사업 준공

□ 문제점 및 대책

◦ 국가산업단지 개발계획에 따라 연접지역 개발계획 변경(지속 협의)