사천시 장애인 국민체육센터 건립

관리번호		3 - 2		주관부서		주민생활지원과 (장애인복지담당)
임기구분		사업구분		예산구분		추진현황					이행률 (%)
임기내	중장기	신규	계속	예산	비예산	완료		추진중		미착수
						종료	지속추진	정상	부진
○		○		○				○			45%

ㅇ 장애인 체육복지 증진 및 생활체육 활성화 공간 조성

ㅇ 장애인의 자립생활 능력 향상 및 정서적 안정과 사회성 향상 도모

□ 사업개요

ㅇ  위    치 : 사천시 용현면 덕곡리 536-17번지 일원

ㅇ  사업기간 : 2015년 ~ 2018년(4년)

ㅇ  사 업 량 : 체육관 1동(지하1층/지상2층, 3,230㎡, 철골․철근 콘크리트)

ㅇ  사 업 비 : 8,500백만원[기금(체육진흥) 5,000/ 시비 3,500]

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년 (임기내)	2018이후 (임기후)
계	8,500		2,000	2,000	4,000	500
국 비 도 비 시 비 민자등			1,000 1,000	2,000	2,000 2,000	500

□ 연도별 달성목표

단위사업	완료목표	2014	2015	2016	2017	2018	2018이후
추진율(누계)	100%	2%	5%	30%	80%	100%	%
장애인국민체육센터	100%	계획수립	사업공모	설계공모 실시설계	착공 및 공사	준공

□ 추진실적

ㅇ  ́14. 08. : 장애인 국민체육센터 건립 계획 수립

ㅇ  ́14. 08 ~ ‘15. 2. : 건립에 따른 사전 행정절차 이행 완료

ㅇ  ́15. 01. : 타당성 조사 및 기본계획 수립용역 완료

ㅇ  ́15. 05. : 건립 지원대상 지역 선정(※ 사업비 중 기금 50억원 확보)

ㅇ  ́16. 03. : 설계발주방식 및 추진계획 검토 보고

ㅇ  ́16. 06. : 공공건축 사업계획서 사전검토(국가공공건축지원센터)

ㅇ  ́16. 08. : 건축설계공모 시행 – 7개 업체 응모

ㅇ  ́16. 11. : 설계공모안 선정 및 실시설계 용역 시행

ㅇ ‘16. 11 ~ ’17. 6 : 기본 및 실시설계 용역 시행

□ 향후 추진계획

ㅇ 계약심의위원회 및 착공 : ’17. 7

ㅇ 공사시행 : ’17. 7 ~ ‘18. 7

□ 문제점 및 대책

ㅇ 문제점 : 장애인 특화 공공시설로 장애물 없는 생활환경 인증(BF) 및 각종 예비 인증(녹색건축, 에너지효율등급)을 위한 소요기간이 개략 2~3개월로 용역 일시중지로 인한 공정지연이 우려됨.

ㅇ 대  책 : 설계안에 대한 인허가 및 각종 예비 인증에 대하여 외부기관 컨설팅등을 통해 신속한 처리