구도심 및 주거지 재생프로젝트 추진

관리번호		7 - 1		주관부서		도시과( 도시재생담당)
임기구분		사업구분		예산구분		추진현황					이행률 (%)
임기내	중장기	신규	계속	예산	비예산	완료		추진중		미착수
						종료	지속추진	정상	부진
○		○		○				○			30

◦ 도시의 경제적·사회적·문화적 활력 회복을 위하여 공공의 역할과 지원  강화

◦ 도시의 자생적 성장기반을 확충하고 도시의 경쟁력을 제고하며, 지역 공동체를

회복하는 등 시민의 삶의 질 향상

□ 사업개요

◦ 위    치 : 사천시 일원

◦ 용역기간 : 2014 ∼ 2017

◦ 용역내용 : 도시재생 대상지 선정, 전략계획 및 활성화 계획 수립

- 면    적 : 1.98㎢(곤양, 서포, 동서A, B, 선구, 동서금일원)

◦ 용 역 비 : 389백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년 (임기내)	2018이후 (임기후)
계	389	100	289
국 비 도 비 시 비 민자등	389	100	289

□ 연도별 달성목표

단위사업	완료목표	2014	2015	2016	2017	2018	2018이후
추진율(누계)	100%	5%	15%	50%	100%	%	%
구도심지 및 주거지 재생프로젝트 추진	100%	행정절차 이행(용역발주)	대상지선정 (용역)	전략계획수립 (용역)	전략계획수립 (용역) 및 공모신청

□ 추진실적

◦  ‘13. 06. : 『도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법』제정

◦  ‘13. 10. : 도시재생 관련 정책 포럼

◦  ‘14. 05. : 『건설기술관리법』개정에 따른 사업수행능력 세부평가 기준(안) 협의

◦  ‘14. 06. : 용역발주에 따른 기술심사 협의(경남도)

◦  ‘14. 08. : 도시재생 전략계획 및 활성화 계획수립 용역 시행

◦  ‘14. 12. : 용역발주에 따른 기술심사 (경남도)

◦  ‘15. 04. : 도시재생 전략계획 및 활성화 계획 수립 용역

- 일상감사 및 계약심사 완료

◦  ‘15. 07. : 용역 착수(337,480천원)

[(주)도화엔지니어링, ㈜정림이엔씨건축사사무소]

◦  ‘16. 02. : 활성화지역 선정에 따른 용역 중간보고

◦  ‘16. 09. : 도시재생 전략계획(안)에 대한 공청회 개최 및 시의회 의견청취

◦  ‘16. 10. : 시 도시계획위원회 자문, 관련 부서(기관) 협의

◦  ‘16. 10. ~ 12. : 사천시 도시재생대학 운영

◦  ‘16. 11. : 사업총괄코디네이터 위촉, 행정협의회 구성

◦  ‘17. 01. : 조례 제정, 도시재생전략계획 승인 신청(경남도)

◦  ‘17. 02. : 승인신청서 보완 요청(경남도), 주민협의체 구성 및 발대식 개최

◦  ‘17. 03. : 도시재생전략계획 승인신청서 보완 작성중

ㅇ 투자실적 및 총 공정률

- 투 자 실 적 : 백만원(국비 , 도비 , 시비 , 민자 등)

- 총 공정률(%) : 30%

□ 향후 추진계획

◦  ‘17. 06. : 사천시 도시재생 전략계획 승인신청서 보완 제출

◦  ‘17. 09. : 사천시 도시재생 전략계획 승인(경남도)

◦  ‘18. 01. : 국토교통부 소관 2018년도 공모사업 신청