테마형 생태하천 만들기

관리번호		2-14		주관부서		건설수도과 (하천담당)
임기구분		사업구분		예산구분		추진현황					이행률 (%)
임기내	중장기	신규	계속	예산	비예산	완료		추진중		미착수
						종료	지속추진	정상	부진
	○		○	○				○			82

ㅇ 자연과 생물이 되살아나는 시민들의 친숙한 생태하천조성

ㅇ 고유한 역사, 문화 공간과 연계한 친수공간을 조성하는 등 과거, 현재, 미래가         공존하며 정감어린 아름다운 하천을 조성

ㅇ 생태하천 조성으로 문화 및 여가 공간 확보로 시민의 삶의 질 향상

□ 사업개요

ㅇ  위    치 : 사천시 관내 ┌지방하천(사천강,중선포천,목단천,송전천,묵곡천,봉남천)

└소 하 천(신벽천,상촌천,학촌천)

ㅇ  사업기간 : 2014년~2018년

ㅇ  사 업 량 : 생태하천 조성 L=20.58km

ㅇ  사 업 비 : 39,928백만원(국비21,958, 도비6,579, 시비11,391)

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년 (임기내)	2018이후 (임기후)
계	39,928	19,821	6,633	6,774	4,700	2,000
국 비 도 비 시 비 민자등	21,958 6,579 11,391	11,533 3,251 5,037	3,650 500 2,483	3,425 1,264 2,085	2,350 1,324 1,026	1,000 240 760

□ 연도별 달성목표

단위사업	완료목표	2014	2015	2016	2017	2018	2018이후
추진율(누계)	100%	10%	30%	70%	90%	100%	%
테마형 생태하천 만들기		신벽소하천 준공	송전천, 봉남천 준공	상촌천, 목단천, 중선포천 준공	묵곡천 준공	학촌소하천 준공

□ 추진실적

◦2013. 12. : 송전천 하도 준설사업 착공

◦2013. 09. : 신벽소하천 정비공사 착공

◦2014. 03. : 중선포천 수해상습지 개선사업 착공

◦2014. 04. : 상촌소하천 실시설계용역 완료 및 보상협의

◦2014. 06. : 목단천 하도 준설사업 착공(총괄분, 2014년도분)

◦2014. 10. : 신벽소하천 정비공사 준공

◦2015. 01. : 목단천 하도 준설사업 착공(2015년도분)

◦2015. 01. : 송전천 하도 준설사업 준공

◦2015. 02. : 묵곡천 수해상습지 개선사업 실시설계용역 착수

◦2015. 02. : 상촌소하천 정비공사 착공

◦2015. 04. : ‘16년도 지방하천 정비사업 신청(경남도, 부산청)

◦2015. 06. : 봉남2지구 수해상습지 개선사업 준공

◦2015. 06. : 학촌소하천 정비공사 실시설계용역 완료

◦2015. 07. : 묵곡천 수해상습지 개선사업 실시설계용역 완료

◦2015. 10. : 목단천 하도 준설사업(상류부) 시행 및 계약심사

◦2015. 11. : 목단천 하도 준설사업(상류부) 착공

◦2015. 12. : 학촌소하천 정비공사 분할측량, 감정평가 및 보상협의

◦2016. 01. : 묵곡천 수해상습지 개선사업 보상협의 및 공사 착공

◦2016. 03. : 학촌소하천 정비공사 착공

◦2016. 05. : 목단천 하도 준설사업 준공(2014년도분)

◦2016. 06. : 중선포천 수해상습지 개선사업 준공

◦2016. 08. : 상촌소하천 정비공사 준공

◦2016. 12. : 목단천 하도 준설사업 준공

◦2017. 03. : 학촌소하천 정비공사(2017년분) 착공

◦2017. 04. : 학촌소하천 정비공사(2016년분) 준공

□ 향후 추진계획

◦2017. 12. : 묵곡지구 하천재해예방사업 준공

학촌소하천 정비공사(2017년분) 준공

◦2018. 12. : 학촌소하천 정비공사 준공