어촌마을 정비사업(송포마을권역종합정비사업)

관리번호		4 - 2		주관부서		지역개발과(농촌개발담당)
임기구분		사업구분		예산구분		추진현황					이행률 (%)
임기내	중장기	신규	계속	예산	비예산	완료		추진중		미착수
						종료	지속추진	정상	부진
○			○	○				○			40

ㅇ 마을의 경관개선, 생활환경정비 및 주민소득기반 확충 등을 통한 도시민의

인구유입 및 지역별 특색 있는 발전도모

□ 사업개요

ㅇ 위    치 : 사천시 대방동, 실안동 일원

ㅇ 사업기간 : 2014년 ~ 2018년

ㅇ 사 업 량 : 마을권역종합정비 1개 권역

ㅇ 사 업 비 : 3,374백만원(국 2,362, 도 304, 시 708), 자부담 195백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년 (임기내)	2019이후 (임기후)
계	3,569	347	430	1,000	1,792	-	-
국 비 도 비 시 비 민자등	2,362 304 708 195	243 31 73 -	301 39 90 -	700 90 210	1,118 144 335 195	- - - -	- - - -

□ 연도별 달성목표

단위사업	완료목표	2014	2015	2016	2017	2018	2018이후
추진율(누계)	100%	5%	10%	30%	60%	100%	%
송포마을 권역단위종합정비사업		기본계획	기본계획	시행계획	공사	공사 및 준공

□ 추진실적

ㅇ 2014. 6. : 위․수탁 계약체결 사업시행

ㅇ 2015. 8. 31. : 기본계획 수립 및 고시

ㅇ 2017. 1. 19. : 시행계획 수립 및 고시

ㅇ 2017. 4. 13. : 공사 착공

□ 향후 추진계획

ㅇ 2018. 12. : 공사 준공

□ 문제점 및 대책

ㅇ 해당없음