삼천포신항 활성화

관리번호		6-11		주관부서		해양수산과(연안관리담당)
임기구분		사업구분		예산구분		추진현황					이행률(%)
임기내	중장기	신규	계속	예산	비예산	완료		추진중		미착수
						종료	지속추진	정상	부진
	◯		◯	◯				◯			55

◦ 신ㆍ구항 배후세력권내 어업전진기지화 도모

◦ 신ㆍ구항의 전용기능 부여로 항만물류산업 및 지역경제 활성화

□ 사업개요

◦ 시행주체 : 경상남도(항만물류과)

◦ 위    치 : 향촌동 삼천포 신항(지방관리 무역항)

◦ 사업기간 : 2011년 ~ 2020년(제3차 항만기본계획)

◦ 사 업 량 : 구항 동방파제 해수유통구, 대방항 연결도로 등 5개

◦ 사 업 비 : 90,900백만원(국비)

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년 (임기내)	2018후 (임기후)	비고
계	90,900	36,100	5,200	5,200	5,200	22,500	16,700
국 비 도 비 시 비 민자등	90,900 - - -	36,100 - - -	5,200 - - -	5,200 - - -	5,200 - - -	22,500 - - -	16,700 - - -

□ 연도별 달성목표

단위사업	완료목표	2014	2015	2016	2017	2018	2018이후
추진율(누계)	100%	40%	46%	52%	58%	83%	100%
삼천포신항 활성화	100%	1~3차 항만 기본계획 투자	삼천포신항 파제제 설치	구항 해수유통구 설치	- 구항 해수유통구 설치 - 대방항 진입도로 및 호안정비	구항 동방파제 연장	- 구항 재해방지시설, - 재해방지시설 (물양장), 해안공원 보도교

□ 추진실적

ㅇ 2016. 09. : 해양공원보도교 및 재해방지시설(물양장) 항만기본계획 수정계획에 반영

ㅇ 2016. 12. : 구항 동방파제 해수유통구 설치 실시 설계 완료

ㅇ 2017. 05. : 구항 동방파제 해수유통구 설치공사 착공

ㅇ 2017. 08. : 주민설명회 개최(해수유통구 설치관련 주민의견 수렴)

□ 향후 추진계획

ㅇ 향후 투자계획(제3차 항만기본계획)

- 구항 동방파제 해수유통구 설치 : 5,200백만원(2016 ~ 2019)

- 대방항 진입도로 및 호안 정비 : 5,200백만원(2017 ~ 2018)

- 구항 동방파제 연장 : 22,500백만원(2018 ~ 2019)

- 구항 재해방지시설 : 4,200백만원(2019 ~ 2020)

- 재해방지시설(물양장) : 5,000백만원(2019 ~ 2020)

- 해양공원보도교 : 7,500백만원(2019 ~ 2020)

ㅇ 제4차 항만기본계획 수립대비 수요조사