도시가스 확대 보급사업

관리번호		1 - 9		주관부서		투자유치과 (에너지담당)
임기구분		사업구분		예산구분		추진현황					이행률 (%)
임기내	중장기	신규	계속	예산	비예산	완료		추진중		미착수
						종료	지속추진	정상	부진
○		○		○				○			75

ㅇ경제성 없어 도시가스가 공급되지 않는 단독주택 지역에 공급관로 설치비 지원

ㅇ저렴하고 안전한 도시가스 공급지역 확대를 통한 가정연료비 절감 및  삶의 질 향상

□ 사업개요

ㅇ  위    치 : 관내 단독주택 밀집지역

ㅇ  사업기간 : 2015. 1. ~ 2018. 12.

ㅇ  사 업 량 : 도시가스 공급관 L=15km, 공급세대 1,500세대

ㅇ  사 업 비 : 1,950백만원(도비 400, 시비 1,550)

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년 (임기내)	2018이후 (임기후)
계	1,950		367	405	603	575
국 비 도 비 시 비 민자등	309 1,641		101 266	105 300	103 500	575

□ 연도별 달성목표

단위사업	완료목표	2014	2015	2016	2017	2018	2018이후
추진율(누계)	100%	%	25%	52%	75%	100%	%
도시가스 확대 보급사업	공급관 15km 공급 1,500세대		3.7km 375	7.5km 750	11.2km 1,125	15km 1,500

□ 추진실적

ㅇ 도시가스 확대 보급실적

- 투 자 실 적 : 1,290백만원(국비 , 도비 224, 시비 1,066, 민자 등)

- 총 공정률(%) : 공급관 설치(61%), 공급세대(69%)

ㅇ ‘17.  4월 : 지원 대상지 선정

- 사천읍 : 정의2리, 평화1리 일원

- 동서동 : 4통~15통 일원

- 동서금동 : 6통, 9통, 13통 일원

ㅇ ‘17.  6월 : 동서금동지역 공사 착공

ㅇ ‘17.  8월 : 동서동 지역 공사 착공

ㅇ ‘17.  9월 : 사천읍 정의2리 지역 공사 착공

ㅇ ‘17. 10월 : 사천읍 평화지역 공사 착공 및 동서금동 공사 완료

ㅇ ‘17. 11월 : 동서동 및 정의2리 공사 완료

ㅇ ‘17. 12월 : 사천읍 평화리 공사 완료

□ 향후 추진계획

ㅇ ‘18. 1월 : 2018년도 지원 대상지 선정

ㅇ ‘18. 2월 : 2018년도 지원 대상지 확정

□ 문제점 및 대책

ㅇ ‘18년부터 단독주택지역 도시가스 공급을 위한 도비 보조금 중단

ㅇ 도비 부족분 시비로 확보하여 보급사업 추진