자연친화적 근린공원 조성

관리번호		7 - 8		주관부서		녹지공원과 (공원담당)
임기구분		사업구분		예산구분		추진현황					이행률 (%)
임기내	중장기	신규	계속	예산	비예산	완료		추진중		미착수
						종료	지속추진	정상	부진
	○		○	○			○	○			23

ㅇ 쾌적한 공원환경 조성ㆍ관리로 이용객 편의제공 및 시민의 삶의 질 향상

□ 사업개요

ㅇ  위    치 : 성내공원 외 10개소(모충,용강,노대,남산,월성,곡성,덕곡,서포,송포,목섬)

ㅇ  사업기간 : 2015. ~ 2018.

ㅇ  사 업 량 : 11개소 1,484천㎡

ㅇ  사 업 비 : 11,000백만원(국비 1,000  도비 60,  시비 4,940  민간 5,000)

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년 (임기내)	2018이후 (임기후)
계	11,000	1,700	100	500	205	838	7,657
국 비 도 비 시 비 민자등	1,000 60 4,940 5,000	1,700	100	200 60 240	205	838	800 1,857 5,000

단위사업	완료목표	2014	2015	2016	2017	2018	2018이후
추진율(누계)	100%	16%	17%	21%	23%	30%	100%
자연친화적 근린공원 조성	100%	부지매입 및 공원조성	부지매입 및 공원조성	부지매입 및 공원조성	부지매입 및 공원조성	부지매입 및 공원조성	부지매입 및 공원조성

□ 연도별 달성목표

□ 추진실적

ㅇ 기투자실적 : 2,505백만원

ㅇ '17. 투자실적 : 205백만원(시비 205)

- 성내공원 : 부지매입 175백만원

- 모충공원 : 산책로 연결 30백만원

ㅇ 총 공정률(%) : 23%

□ 향후 추진계획

ㅇ 2018년 : 성내ㆍ모충공원 토지매입 838백만원

ㅇ 2019년 이후 : 성내공원 등 부지매입 및 공원조성 7,657백만원

□ 문제점 및 대책

ㅇ 시 재정여건상 공원부지 매입을 통한 공원조성이 어려워 10만㎡ 이상 공원(모충, 용강, 노대, 남산공원)은 민간참여 유도로 계획중이나 민간참여 전무

⇒ 향후 민자사업 50억은 년도별 투자사업비에서 제외 검토 필요

ㅇ 중앙기관ㆍ산림청 등 국․도비지원 공모사업에 지속적인 노력 경주