도시가스 확대 보급사업

관리번호		1-9		주관부서		지역경제과(에너지팀)
임기구분		사업구분		예산구분		추진현황					이행률 (%)
임기내	중장기	신규	계속	예산	비예산	완료		추진중		미착수
						종료	지속추진	정상	부진
○		○		○				○			75

ㅇ 경제성 없어 도시가스가 공급되지 않는 단독주택 지역에 공급관로 설치비 지원

ㅇ 저렴하고 안전한 도시가스 공급지역 확대를 통한 가정연료비 절감 및  삶의 질 향상

□ 사업개요

ㅇ 위    치 : 관내 단독주택 밀집지역

ㅇ 사업기간 : 2015. 1. ~ 2018. 12.

ㅇ 사 업 량 : 도시가스 공급관 L=15km, 공급세대 1,500세대

ㅇ 사 업 비 : 2,065백만원(도비 524, 시비 1,541)

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년 (임기내)	2018이후 (임기후)
계	2,065		367	405	603	690
국 비 도 비 시 비 민자 등	524 1,541		101 266	105 300	103 500	215 475

단위사업	완료목표	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2018이후
추진율(누계)	100%	%	25%	52%	75%	100%	%
도시가스 확대 보급사업	공급관 15km 공급 1,500세대		3.7km/ 375세대	7.5km/ 750세대	11.2km/ 1,125세대	15km/ 1,500세대

□ 연도별 달성목표

□ 추진실적

ㅇ 도시가스 확대 보급실적(2015~2017년)

- 투 자 실 적 : 1,375백만원(도비 309, 시비 1,066,)

- 총 공정률(%) : 공급관 설치(74%), 공급세대(75%)

ㅇ ‘18.  1월 : 도시가스 공급구역 보조금 지원사업 대상지역 신청공고

ㅇ ‘18.  3월 : 공급 대상지역 접수 및 타당성 검토(신청 : 9개지역)

□ 향후 추진계획

ㅇ ‘17.  4월 : 지원 대상지 선정

- 사천읍 : 평화리, 선인리, 정의리 일원

- 동서금동 : 12통 일원

- 동서동 : 5통, 6통, 9통, 13통 일원

ㅇ ‘18.  6월 : 사천읍지역 공사 착공

ㅇ ‘18.  8월 : 동서금동 지역 공사 착공

ㅇ ‘18.  9월 : 동서동 지역 공사 착공

ㅇ ‘18. 10월 : 사천읍 지역 공사 완료

ㅇ ‘18. 11월 : 동서금동 공사 완료

ㅇ ‘18. 12월 : 동서동 공사 완료