항공 R&D 센터 건립

관리번호		2-1		주관부서		우주항공과(우주항공산업팀)
임기구분		사업구분		예산구분		추진현황					이행률 (%)
임기내	중장기	신규	계속	예산	비예산	완료		추진중		미착수
						종료	지속추진	정상	부진
	○	○		○				○			15

ㅇ 글로벌 항공 복합재 시장진입 확대를 위한 시험평가분석시스템 구축

ㅇ 복합재 시편 제작 및 품질보증시스템 확보

ㅇ 항공 복합소재 실용개발을 위한 전주기 지원시스템 기반 마련

□ 사업개요

ㅇ 사 업 명 : 항공기 복합소재 시험평가분석시스템 구축

ㅇ 위    치 : 사천시 사남면 경남테크노파크(항공우주센터)

ㅇ 사업기간 : 2019년 ~ 2021년(3년)

ㅇ 사 업 량 : 장비 및 시설 구축, 복합재 물성치 확보, 인증시스템 구축 등

ㅇ 사 업 비(계획) : 273억원(국비 100, 지방비 157, 민자 16)

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년 (임기내)	2018이후 (임기후)
계	27,300						27,300
국 비	10,000						10,000
도 비	7,850						7,850
시 비	7,850						7,850
민자 등	1,600						1,600

단위사업	완료목표	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2018이후
추진율(누계)	100%	%	%	%	%		100%
항공 R&D센터 건립							항공기 복합소재 시험평가분석시스템 구축

□ 연도별 달성목표

□ 추진실적

ㅇ ‘13. 07. ~‘13. 08. : 중소기업체 수요(필요성) 제기

ㅇ ‘14. 05. ~‘14. 07. : 기획위원회 구성 및 운영

ㅇ ‘14. 11. ~‘15. 09. : 타당성 연구용역 수행(산업연구원)

ㅇ ‘15. 08. ~‘15. 09. : 산업부(자동차항공과) 신규사업 반영 협의

ㅇ ‘16. 01. ~‘16. 03. : 신규신청 사업 내용 설명(산업부)

ㅇ ‘16. 03. : 규제프리존 재정지원사업 제출

ㅇ ‘16. 06. ~‘16. 07. : 기획재정부 예산심의(산업부 ‘17년 국비 20억 반영요구)

ㅇ ‘17. 04. ~‘17. 06. : 4차 산업혁명대비 경남전략산업 기본계획 사업 반영

ㅇ ‘17. 05. : 경남도 대통령 지역공약 국정과제 채택건의서 반영

ㅇ ‘17. 06. : ’17년 경남지역고용전략 수립 계획 반영

ㅇ ‘18. 01. : ’19년 지역산업 거점기관 지원사업 신청

ㅇ ‘18. 01. 19. : ’19년 지역산업 거점기관 지원사업 경남도 후보 선정(사천시→경남도)

ㅇ ‘18. 01. 22. : ’19년 지역산업 거점기관 지원사업 최종 신청

(경남도 → 산업부, 한국산업기술진흥원)

ㅇ ‘18. 02. 22. : ’19년 지역산업 거점기관 지원사업 사전검토 1차 회의

ㅇ ‘18. 03. 06. : ’19년 지역산업 거점기관 지원사업 사전검토 2차 회의

□ 향후 추진계획

ㅇ ‘18. 04. 12. : ’19년 지역산업 거점기관 지원사업 민간평가위원회 평가

ㅇ ‘18. 04. : ’19년 지역산업 거점기관 지원사업 최종 확정

ㅇ ‘19. 01. ~‘20. 06. : 연구동 및 시험지원동 구축 설계용역

ㅇ ‘19. 01. ~‘21. 12. : 연구동 및 시험지원동 건립

ㅇ ‘19. 06. ~‘21. 12. : 시험평가분석 장비 구축

ㅇ ‘19. 06. ~‘21. 12. : 항공기 복합재 부품 인증시스템 구축

ㅇ ‘20. 01. ~ : 항공우주용 복합소재 물성치 DB 구축

ㅇ ‘22. 03. ~ : 경남 도내 업체 지원 및 구축 완료

□ 기대효과

ㅇ 국내 생산 763억원, 부가가치 268억원, 고용창출 558명 예상

ㅇ 항공기 복합재 부품 시험평가분석시스템 구축에 따른 중소기업의 직접적인 수주계약 달성

ㅇ 정부(국방) 인증 수요 충족으로 향후 보라매(KF-X)사업 등 정부사업을 효율적으로 지원

ㅇ 물성치 확보를 통해 복합재 부품 시험평가 고도화 및 기술개발에 기여

□ 문제점 및 대책

ㅇ 지역전략산업 육성을 위한 규제프리존의 지정과 운영에 관한 특별법

(일명 : 규제프리존 특별법) 법제화 보류로 사업제안 표류

ㅇ 2019년도 지역산업거점기관지원사업 반영 추진