송포 미래창조산업단지 집중 조성

관리번호		2-7		주관부서		산단관리과(산단조성팀)
임기구분		사업구분		예산구분		추진현황					이행률 (%)
임기내	중장기	신규	계속	예산	비예산	완료		추진중		미착수
						종료	지속추진	정상	부진
	○		○	○				○			20

ㅇ 항공산업 인프라 구축을 위한 경량항공기 생산, 연구, 교육훈련 단지조성 및 이착륙장 설치로 명품 관광레저도시 건설

□ 사업개요

ㅇ 위    치 : 사천시 송포동 617-5번지 앞 공유수면

ㅇ 사업기간 : 2015 ~ 2022년

ㅇ 사 업 량 : 부지조성 937,341㎡

ㅇ 사 업 비 : 1,600억원

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년 (임기내)	2018이후 (임기후)
계	160,000			1,000	200	4,000	154,800
국 비
도 비
시 비	80,000			1,000	200	4,000	74,800
지방채	80,000						80,000

□ 연도별 달성목표

단위사업	완료목표	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2018이후
추진율(누계)	100%	%	5%	15%	20%	50%	100%
송포 미래창조산업단지 집중 조성	100%		현장조사 및 사업계획수립	행정절차 추진		타당성조사 완료, 투자심사 및 산업단지 계획수립	산업단지 계획 승인 및 사업추진 (보상, 감리)
				이착륙장 공모 지정계획 확정	타당성조사 추진

□ 추진실적

ㅇ ’14.  7.    : 민선6기 송도근시장 공약사업

ㅇ ‘15.  1.  9. : 송포 미래창조 첨단산업단지 개발계획 보고회개최

ㅇ ‘16.  4. 28. : 송포산단 일원 사천시 제2차 연안관리지역계획고시

ㅇ ‘16. 11. 28. : 항공레저 이착륙장 공모사업 선정

ㅇ ‘17.  1. 23. : 2017년 산업단지 지정계획 반영

ㅇ ‘17.  2.  1. : 양해각서 체결[아론비행선박(주)]

ㅇ ‘17.  7. 12. : 양해각서 체결[(주)베셀]

ㅇ ‘17.  8. 14. : 지방재정투자사업심사 타당성조사 협약(한국지방행정연구원)

ㅇ ‘17.  9.  1. : 타당성조사 현장실사

ㅇ ‘17. 12.  8. : 제7차 산업입지정책심의위원회 심의

ㅇ ‘17. 12. 18. : 2018년 산업단지지정계획 반영

ㅇ ‘17. 12. 21. : 2018년 산업단지지정계획 고시(경상남도)

ㅇ ‘18.  1. 30. : 타당성조사 중간보고

ㅇ ‘18.  2.  9. : 타당성조사 중간보고 결과 수정요구

- 할인율, 신규투자율, 재무성 분석, 총사업비 적정성, 시설부대경비 등

ㅇ ‘18.  2. 23. : 타당성조사 협의

□ 향후 추진계획

ㅇ ‘17.  8. ~ ’18.  9. : 타당성 조사 및 지방재정 투자심사 완료

ㅇ ‘18.  9. ~ '19. 12. : 산업단지계획 수립 및 승인

ㅇ ‘20.  1. ~ ’22. 12. : 사업추진

□ 문제점 및 대책

ㅇ 송포산단 타당성조사 결과에 따라 사업추진 여부 결정

ㅇ 행정절차 선행 전 50억 원 정도 소요되는 용역 추진 애로

⇒ 향후 타당성조사 결과에 따라 산업단지계획 수립용역 시행