사천 종포일반산업단지 조성

관리번호		2-10		주관부서		우주항공과(우주항공지원팀)
임기구분		사업구분		예산구분		추진현황					이행률 (%)
임기내	중장기	신규	계속	예산	비예산	완료		추진중		미착수
						종료	지속추진	정상	부진
○			○	○				○			99

ㅇ 사천시를 항공산업의 중심도시로 육성하고 항공산업 클러스트 구축

ㅇ 사천시의 미래를 책임질 성장동력기반 마련 및 경제 활성화

□ 사업개요

ㅇ 위    치 : 사천시 용현면 신촌리 584번지 일원

ㅇ 사업기간 : 2014년 ~ 2018년

ㅇ 사 업 량 : 산업단지조성 1식 A=376,146.6㎡

ㅇ 사 업 비 : 65,866백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년 (임기내)	2018이후 (임기후)
계	65,866	44,000		12,300	9,566
국 비 도 비 시 비 지방채 등	65,866	44,000		12,300	9,566

단위사업	완료목표	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2018이후
추진율(누계)	100%	10%	40%	90%	99%	100%	%
사천 종포일반산업단지 조성		승인・고시	보상・공사	공사	공사준공	사업준공

□ 연도별 달성목표

□ 추진실적

ㅇ ‘13. 08. 22 : 투자의향서 타당성검토 결과통보(경남도→사천시)

ㅇ ‘13. 11. 04 : 산업단지지정 승인 신청(종포산단→경상남도)

ㅇ ‘13. 12.    : 중기지방재정계획

ㅇ ‘14. 01. 08 : 지방재정 투․융자 심사(안전행정부)

ㅇ ‘14. 04. 24 : 산업단지 승인 고시(경상남도)

ㅇ ‘14. 05. 29 : 사업시행자 변경 고시 : 종포산단개발(주)→사천시

ㅇ ‘14. 10. 02 : 폐수처리관리기본계획 변경 승인(낙동강유역환경청)

ㅇ ‘14. 11. 24 : 착공(디에치건설, 동원건설산업, 서우건영)

ㅇ ‘14. 12. 23 : 기공식

ㅇ ‘15. 01. 27 : 경상남도지방토지수용위원회 개최

ㅇ ‘15. 06. 18 : 종포일반산업단지 계획(변경) 심의위원회 개최

ㅇ ‘15. 07. 30 : 종포일반산업단지 계획(변경) 승인·고시

ㅇ ‘16. 01. ~ ‘17. 2. : 종포산단 분양

(산업시설 11필지 253,306㎡, 지원시설 1필지 13,563㎡)

ㅇ ‘17. 05. 24 : 산업단지 조성공사 준공

ㅇ ‘17. 12. 28 : 종포일반산업단지 조성사업 기간 변경[사업기간 6월 연장]

ㅇ ‘18. 02. 07 : 종포일반산업단지 계획(변경) 신청

※ 주요내용 : 국가산단 연결도로, 확정측량결과, 완충녹지 일부 해제 등

□ 향후 추진계획

ㅇ ’18. 06. : 사업준공 인가

ㅇ ’19. 01. : 사후(운영시)환경영향평가용역 실시

□ 문제점 및 대책

ㅇ 국가산업단지 개발계획에 따라 연접지역 개발계획 변경(지속 협의)