송포IC~삼천포도서관 그린웨이 조성

관리번호		2-11		주관부서		도시과(도시계획팀)
임기구분		사업구분		예산구분		추진현황					이행률 (%)
임기내	중장기	신규	계속	예산	비예산	완료		추진중		미착수
						종료	지속추진	정상	부진
	○	○		○				○			40

ㅇ 동지역 관문 도로에 쾌적한 가로환경 조성으로 이미지 제고

ㅇ 산업물동량 수송원활 및 보도와 자전거도로 설치로 시민의 안전성 확보와

삶의 질 향상

□ 사업개요

ㅇ 위    치 : 좌룡동 266-6번지 일원

ㅇ 사업기간 : 2011년 ~ 2020년

ㅇ 사 업 량 : L=3.3Km, B=25 ~ 35m

ㅇ 사 업 비 : 30,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년 (임기내)	2018이후 (임기후)
계	30,000	6,200	1,000	3,000	900	1,000	17,900
국 비 도 비 시 비 민자 등	400 5,000 24,600	2,300 3,900	1,000	3,000	400 500	1,000	2,700 15,200

□ 연도별 달성목표

단위사업	완료목표	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2018이후
추진율(누계)	100%	20%	23%	33%	35%	45%	100%
송포IC~삼천포도서관 그린웨이 조성		보상, 공사	보상, 공사	보상, 공사	공사	공사	보상, 공사

□ 추진실적

ㅇ ’11. 03. : 1차구간 실시설계 및 보상협의

ㅇ ’11. 04. : 1차구간 공사착공

ㅇ ’12. 09. : 1차구간 공사준공

ㅇ ’14. 03. : 2차구간 보상협의 (계속)

ㅇ ’14. 10. : 중기지방재정계획

ㅇ ’14. 11. : 지방재정 투융자 심사

ㅇ ’15. 05. : 2차 구간 중 남양중학교 ~ 송포교 구간 공사착공(L=298m)

ㅇ ’16. 03. : 2차 구간 보상 추진( 28건/5억 )

ㅇ ’16. 08. : 2차 구간 남양중학교 ~ 송포교 구간 공사준공(L=298m)

ㅇ ’17. 03. : 송포교 가설 실시설계용역 착수

ㅇ ’17. 06. : 송포교 가설 실시설계용역 준공

ㅇ ’17. 07. : 하천점용 협의

ㅇ ’17. 11 : 송포교~죽림삼거리 구간 공사 착공(L=1,202m)

□ 향후 추진계획

ㅇ ’18. 01~ : 공사시행 계속