사천시 장애인 국민체육센터 건립

관리번호		3-2		주관부서		주민생활지원과(장애인복지팀)
임기구분		사업구분		예산구분		추진현황					이행률 (%)
임기내	중장기	신규	계속	예산	비예산	완료		추진중		미착수
						종료	지속추진	정상	부진
○		○		○				○			55

ㅇ 장애인 체육복지 증진 및 생활체육 활성화 공간 조성

ㅇ 장애인의 자립생활 능력 향상 및 정서적 안정과 사회성 향상 도모

□ 사업개요

ㅇ 위    치 : 사천시 용현면 덕곡리 536-17번지 일원

ㅇ 사업기간 : 2015년 ~ 2018년(4년)

ㅇ 사 업 량 : 체육관 1동(지하1층/지상2층, 3,058.02㎡, 철근콘크리트조 및 철골조)

ㅇ 사 업 비 : 8,500백만원[기금(체육진흥) 5,000/ 시비 3,500]

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년 (임기내)	2018이후 (임기후)
계	8,500		2,000	2,000	4,000	500
국 비 도 비 시 비 민자 등	5,000 3,500		1,000 1,000	2,000	2,000 2,000	500

단위사업	완료목표	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2018이후
추진율(누계)	100%	2%	5%	30%	60%	95%	100%
장애인 국민체육센터 건립	100%	계획수립	사업공모	설계공모 실시설계	착공 및 공사	공사	준공

□ 연도별 달성목표

□ 추진실적

ㅇ  ́14. 08. : 장애인 국민체육센터 건립 계획 수립

ㅇ  ́14. 08. ~ ‘15. 2. : 건립에 따른 사전 행정절차 이행 완료

ㅇ  ́15. 01. : 타당성 조사 및 기본계획 수립용역 완료

ㅇ  ́15. 05. : 건립 지원대상 지역 선정(※ 사업비 중 기금 50억원 확보)

ㅇ  ́16. 03. : 설계발주방식 및 추진계획 검토 보고

ㅇ  ́16. 06. : 공공건축 사업계획서 사전검토(국가공공건축지원센터)

ㅇ  ́16. 08. : 건축설계공모 시행

ㅇ  ́16. 11. : 설계공모안 선정 및 실시설계 용역 시행

ㅇ  ́16. 11. ~  ́17. 6. : 기본 및 실시설계 용역 시행

ㅇ  ́17. 09. : 기본 및 실시설계 용역 최종보고회 개최

ㅇ  ́17. 11. : BF, 녹색건축, 에너지효율등급 예비인증 완료

ㅇ  ́17. 12. : 공사 일상감사, 계약심사 완료 및 공사 시행

ㅇ  ́18. 2. 12. : 공사착공

□ 향후 추진계획

ㅇ 공사준공 : ‘19. 2.

□ 문제점 및 대책

ㅇ 문제점

- 건립부지 내 우수관로 확인 됨에 따라 이설 필요

- 기초공법 파일(27.5M) 항타 작업시 공업용수 및 광역상수도 배관의 노후화로

관로의 파손, 파열 우려됨

ㅇ 대  책

- 우수관로는 파일기초 작업 전 관리부서 입회 하에 이설작업 예정(4월중)

- 기초공법 적정성 여부 검토 계획

▸ 건축구조전문가(경상대학교 윤정배 교수 외 5명)

※ 건축위원회 구조분야전문위원회 5명, 민간전문가 1명

▸ 심의방법 : 서면심의(직접방문)

▸ 심의기간 : 2018. 4. 2. ~ 4. 5.

▸ 심의내용

기초공법(안전 및 경제성 고려), 파일길이(27.5M), 기술시공 적정성

▸ 향후계획 : 서면심사 결과에 따른 기초공법 적정성 검토보고 : 4. 9일한