사천바다 케이블카와 연계한 실안관광지 개발

관리번호		6-4		주관부서		문화관광과(관광개발팀)
임기구분		사업구분		예산구분		추진현황					이행률 (%)
임기내	중장기	신규	계속	예산	비예산	완료		추진중		미착수
						종료	지속추진	정상	부진
〇			〇	〇				〇			40

ㅇ남해안시대 구현을 위한 체류형 관광지 조성과 남해안 거점 레저관광 종합

시설단지 개발로 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

ㅇ 위    치 : 사천시 실안동 일원

ㅇ 사업기간 : 2000년 ~ 2023년

ㅇ 사 업 량 : 256,877㎡(기반시설 및 숙박, 상가시설)

ㅇ 사 업 비 : 140,000백만원(국비 5,800  도비 1,530  시비 10,670 민자 등 122,000)

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년 (임기내)	2018이후 (임기후)
계	140,000	17,930			28,720	93,350
국 비	5,800	3,620			2,180
도 비	1,530	950			580
시 비	10,670	7,360			350	2,960
민자 등	122,000	6,000			25,610	90,390

단위사업	완료목표	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2018이후
추진율(누계)	100%	%	%	5%	20%	50%	100%
관광지개발				소공원조성	실시계획인가 및 기반시설	편익시설	기타시설 등

□ 연도별 달성목표

□ 추진실적

ㅇ '15. 2. 4. : 1단계 사업 조성부지 분양 완료(21필지)

ㅇ '15. 10. ~ '16. 2. : 관광지내 꽃동산 조성공사 시행

ㅇ '16. 5. 12. : 도시계획시설(호텔, 녹지)실시계획인가(호텔 49동)

ㅇ '16. 9. 29. : 실안관광지 조성계획 변경결정

ㅇ '16. 7. ~ 12. : 1단계 조성부지 내 소공원조성(2,700㎡, 300백만 원)

ㅇ '17. 4. 3. : 중소규모 관광(단)지 투자유치 지원 공모사업대상 신청

ㅇ '17. 6. 2. : 중소규모 관광(단)지 투자유치 지원 공모사업대상 현장심사

ㅇ '17. 6. 14. : 실안관광지 내 도로개설공사 착공(L=350m, B=8~15m, 888백만 원)

- 투자실적 : 17,930백만 원(국비3,620, 도비950, 시비7,360, 민자6,000 등)

- 총 공정률(%) : 15%

ㅇ '17. 6. 30. : 실안관광지(호텔, 녹지) 조성사업(호텔 49동) 준공

ㅇ '17. 11. 23. : 실안관광지 내 공중화장실 신축공사 준공

(건축면적 74.0755㎡, 지상1층, 320백만 원)

□ 향후 추진계획

ㅇ '18. 1. ~ : 미개발지역 민자투자 유치홍보 지속추진

ㅇ '18. 3. : 실안관광지 내 기반시설 조성사업 추진 : 1회 추경 신청(2,000백만 원)

- 도로개설 4개소, 주차장 2개소

ㅇ '18. 6. 13. : 실안관광지 내 도로개설공사 준공(L=350m, B=8~15m)

□ 문제점 및 대책

ㅇ 민자유치를 위하여 여러 차례 공모하였으나 사업성 결여 등으로 MOU체결 후 중도포기

ㅇ 사천바다 케이블카 준공시기 도래에 따라 숙박시설 유치 및 음식점 입점으로 민자투자가 활발히 유치되고 있는 실정이며, 적극적인 홍보활동으로 민자투자 유치

극대화 도모