생태관광 사천 바닷길 10코스 조성

관리번호		6-5		주관부서		문화관광과(관광진흥팀)
임기구분		사업구분		예산구분		추진현황					이행률 (%)
임기내	중장기	신규	계속	예산	비예산	완료		추진중		미착수
						종료	지속추진	정상	부진
〇		〇		〇				〇			90

ㅇ 아름다운 섬과 삼천포항을 연결하는 생태관광 바닷길 조성에 따른 사천

바닷길 10코스 지정 관광코스로 홍보하여 관광객 유치함

□ 사업개요

ㅇ 위    치 : 비토섬,신수도,신도,마도,저도,진도,월등도,별학도,초양도,늑도,학섬,삼천포항 일원

ㅇ 사업기간 : 2015년 ~ 2018년

ㅇ 사업내용 : 생태관광 바닷길 10코스 지정을 위한 관광체계 구축

- 테마형 힐링 아일랜드 개발과 연계한 산책로, 관찰 데크 등

- 종합안내판, 코스안내판, 방향안내판, 옥외용벤치 등 설치

ㅇ 사 업 비 : 570백만 원(국비 300, 도비 90, 시비 180)

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년 (임기내)	2018이후 (임기후)
계	570		20	180	180	190
국 비 도 비 시 비 민자 등	300 90 180		20	100 30 50	100 30 50	100 30 60

□ 연도별 달성목표

단위사업	완료목표	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2018이후
추진율(누계)	100%	10%	30%	50%	90%	100%	%
생태관광 사천 바닷길 10코스 조성		계획수립	섬 안내판 및 안내도설치완료 홍보책자 제작 배부	팔각정자, 데크,방향표지판 설치 및 홍보책자 제작 배부	도보길 등 부대시설 설치	10코스 지정운용

□ 추진실적

ㅇ '15. 4. : '15년도 도서개발 사업완료(신수도, 마도)

ㅇ '15. 4. : 생태관광코스 안내판 설치(비토섬, 삼천포항)/17,600천원

ㅇ '15. 6. : 섬 관광 안내도 설치(신수도, 비토섬)/14,600천원

ㅇ '15. 8. : 섬 관광 안내책자 제작/4,500천원

ㅇ '16. 7. : 비토섬 종합 관광안내판 3개 설치/15,345천원

ㅇ '16. 8. : 신수도 팔각정자 3개소 설치/81,000천원

ㅇ '16. 8. : 신수도 방향표지판 15개 설치/16,000천원

ㅇ '16. 9. : 신수도 목재데크 설치 241㎡/76,000천원

ㅇ '16. 9. : 섬 관광 안내책자 제작배부 1,200부(신수도, 비토섬)/3,561천원

ㅇ '17. 1. : 마도 찾아가고 싶은섬 조성사업 준공(2차분)/162,000천원

ㅇ '18. 3. : 신도 휴게정원 조성완료(A=5,690㎡)/190,000천원

□ 향후 추진계획

ㅇ 신수도 섬 일주 도보길 조성

ㅇ 늑도 관광기반시설 확충

ㅇ 관광안내도 및 관광편의시설 추가 설치

ㅇ 테마형 힐링아일랜드 조성 후 바닷길 홍보 책자 제작

□ 문제점 및 대책

ㅇ 개인사유지 다수인 연명에 따른 토지 사용승낙서 징구 애로로 사업추진 지연

ㅇ 천혜 자연경관을 토대로 생태 관광코스 조성으로 관광활성화 도모