삼천포신항 활성화

관리번호		6-11		주관부서		해양수산과(연안관리팀)
임기구분		사업구분		예산구분		추진현황					이행률(%)
임기내	중장기	신규	계속	예산	비예산	완료		추진중		미착수
						종료	지속추진	정상	부진
	○		○	○				○			55

ㅇ 신ㆍ구항 배후세력권내 어업전진기지화 도모

ㅇ 신ㆍ구항의 전용기능 부여로 항만물류산업 및 지역경제 활성화

□ 사업개요

ㅇ 시행주체 : 경상남도(항만물류과)

ㅇ 위    치 : 향촌동 삼천포 신항(지방관리 무역항)

ㅇ 사업기간 : 2011년 ~ 2020년(제3차 항만기본계획)

ㅇ 사 업 량 : 구항 동방파제 해수유통구, 대방항 연결도로 등 5개

ㅇ 사 업 비 : 90,900백만원(국비)

구 분	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년 (임기내)	2018이후 (임기후)
계	90,900	36,100	5,200	5,200	5,200	22,500	16,700
국 비 도 비 시 비 민자 등	90,900	36,100	5,200	5,200	5,200	22,500	16,700

(단위 : 백만원)

단위사업	완료목표	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2018이후
추진율(누계)	100%	40%	46%	52%	58%	83%	100%
삼천포신항 활성화	100%	1~3차 항만 기본계획 투자	삼천포신항 파제제 설치	구항 해수유통구 설치	∘구항 해수유통구 설치 ∘대방항 진입도로 및 호안정비	구항 동방파제 연장	∘구항 재해방지시설 ∘재해방지시설 (물양장), 해양공원 보도교

□ 연도별 달성목표

□ 추진실적

ㅇ 2016. 09. : 해양공원보도교 및 재해방지시설(물양장) 항만기본계획 수정계획에 반영

ㅇ 2016. 12. : 구항 동방파제 해수유통구 설치 실시 설계 완료

ㅇ 2017. 05. : 구항 동방파제 해수유통구 설치공사 착공

ㅇ 2017. 08. : 주민설명회 개최(해수유통구 설치관련 주민의견 수렴)

ㅇ 2017. 11. : 항내 안정성 향상 민원사항에 대한 조치계획 수립

□ 향후 추진계획

ㅇ 향후 투자계획(제3차 항만기본계획)

- 구항 동방파제 해수유통구 설치 : 5,200백만원(2016년 ~ 2019년)

- 대방항 진입도로 및 호안 정비 : 5,200백만원(2017년 ~ 2018년)

- 구항 동방파제 연장 : 22,500백만원(2018년 ~ 2019년)

- 구항 재해방지시설 : 4,200백만원(2019년 ~ 2020년)

- 재해방지시설(물양장) : 5,000백만원(2019년 ~ 2020년)

- 해양공원보도교 : 7,500백만원(2019년 ~ 2020년)

ㅇ 제4차 항만기본계획 수립대비 수요조사