구 도심 및 주거지 재생 프로젝트 추진

관리번호		7-1		주관부서		도시과(도시재생팀)
임기구분		사업구분		예산구분		추진현황					이행률 (%)
임기내	중장기	신규	계속	예산	비예산	완료		추진중		미착수
						종료	지속추진	정상	부진
○			○	○				○			90

ㅇ 삼천포구항 지역의 문화·관광 등 대체산업 발굴 및 주거지 재생

ㅇ 도시의 자생적 성장기반을 확충하고 도시의 경쟁력을 제고하며, 지역 공동체를

회복하는 등 시민의 삶의 질 향상

□ 사업개요

ㅇ 위    치 : 경남 사천시 동동 485-2번지 일원

ㅇ 사업기간 : 2018년 ~ 2022년(5년간)

ㅇ 사 업 량 : 도시재생(중심시가지형) A=291,829㎡

ㅇ 사 업 비 : 300억원(국비 150억, 도비 30억, 시비 120억)

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년 (임기내)	2018이후 (임기후)
계	30,939	100	289		50	500	30,000
국 비	15,000						15,000
도 비	3,000						3,000
시 비	12,939	100	289		50	500	12,000
민자 등

단위사업	완료목표	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2018이후
추진율(누계)	100%	5%	15%	50%	90%	95%	100%
구도심지 및 주거지 재생프로젝트 추진	100%	행정절차이행 (용역발주)	대상지선정 (용역)	전략계획수립 (용역)	전략계획수립 (용역) 및 공모선정	도시재생 사업추진	도시재생 사업추진

□ 연도별 달성목표

□ 추진실적

ㅇ ‘15. 07. : 용역 착수(337,480천원)

[(주)도화엔지니어링, ㈜정림이엔씨건축사사무소]

ㅇ ‘16. 02. : 활성화지역 선정에 따른 용역 중간보고

ㅇ ‘16. 09. : 도시재생 전략계획(안)에 대한 공청회 개최 및 시의회 의견청취

ㅇ ‘16. 10. : 시 도시계획위원회 자문, 관련 부서(기관) 협의

ㅇ ‘16. 10. ~ 12. : 사천시 도시재생대학 운영

ㅇ ‘16. 11. : 사업총괄코디네이터 위촉, 행정협의회 구성

ㅇ ‘17. 01. : 조례 제정, 도시재생전략계획 승인 신청(경남도)

ㅇ ‘17. 02. : 승인신청서 보완 요청(경남도), 주민협의체 구성 및 발대식 개최

ㅇ ‘17. 09. : 도시재생전략계획 승인신청서 제출(사천시→경상남도)

ㅇ ‘17. 10. : 도시재생 뉴딜 시범사업 신청서 제출

ㅇ ‘17. 12. : 도시재생 뉴딜 시범사업 선정

ㅇ ‘18. 1~2. : 도시재생선도지역 지정 신청을 위한 공청회 및 지방의회 의견수렴

ㅇ ‘18. 2. : 도시재생선도지역 지정 신청(사천시→국토부)

□ 향후 추진계획

ㅇ ‘18. 5 : 활성화계획 수립 및 지방위원회 심의

ㅇ ‘18. 6 : 활성화계획 승인 신청(사천시→국토부)

ㅇ ‘18. 6 : 활성화계획 승인(국토부→사천시)

ㅇ ‘18. 7 : 기본 및 실시설계용역발주 및 사업시행