생활체육시설 확충

관리번호		7-3		주관부서		체육지원과(체육시설팀)
임기구분		사업구분		예산구분		추진현황					이행률 (%)
임기내	중장기	신규	계속	예산	비예산	완료		추진중		미착수
						종료	지속추진	정상	부진
	○		○	○				○			75

ㅇ 시민들의 건강 증진 및 삶의 질 향상을 위한 생활체육시설 공간 조성

□ 사업개요

ㅇ 위    치 : 용현, 곤양, 곤명, 정동 생활체육시설 조성

ㅇ 사업기간 : 2015년 ~ 2020년(6년간)

ㅇ 사 업 량 : 축구장, 테니스장, 족구장 등 조성

ㅇ 사 업 비 : 14,450백만원(국비 1,840, 도비 800, 시비 11,810)

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년 (임기내)	2018이후 (임기후)
계	14,450	1,250	650	1,900	2,650	2,900	5,100
국 비 도 비 시 비 민자 등	1,840 800 11,810	350 900	90 560	400 1,500	200 2,450	500 300 2,100	500 300 4,300

단위사업	완료목표	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2018이후
추진율(누계)	100%	5%	10%	20%	40%	60%	100%
생활체육시설 조성	7개 지역	∘용현 입지 선정 등 ∘곤양,정동 계획수립	∘용현,곤양,정동 사남족구장, 삼천포테니스장 행정절차 이행 ∘곤명토목준공	∘용현 행정절차이행 ∘곤양·정동설계 및 공사 추진 ∘곤명 건축준공	∘용현실시설계 ∘곤양,정동준공 ∘어린이 시설준공 ∘다목적 시설준공	용현 보상	용현 착공 및 준공

□ 연도별 달성목표

□ 추진실적

ㅇ 용현 생활체육시설 조성

‣ 총 사업비 : 8,500백만원(국비 1,000, 도비 600, 시비 6,900)

‣ 총 공정률(%) : 15%(행정절차 이행 중)

- ‘13. 10~12월 : 후보지 주민설명회 개최(3회) 부지위치 결정

- ‘13. 12. 18. : 체육시설 입지 확정

- ‘14. 10. 21. : 시 공유재산심의회(원안가결)

- ‘15. 03. 11. : 지방재정 투융자심사(도심사) 조건부 가결

- ‘17. 09. 25. : 문화재 지표조사

- ‘17. 12. : 실시설계 및 진흥구역해제 용역 시행

- ‘18. 03. : 지질조사용역 시행

ㅇ 곤양 생활체육시설 조성

‣ 총 사업비 : 2,750백만원(국비 350, 시비 2,400)

‣ 총 공정률(%) : 100%

- ‘13. 10월 : 공유재산심의회 가결 및 관리계획 반영

- ‘15. 03. 11. : 지방재정 투융자심사(도심사) 조건부 가결

- ‘16. 07. 27. : 공사 착공

- ‘17. 01. 09. : 2차분 착공

- ‘17. 04. 14. : 1차분 준공

- ‘17. 05. 17. : 조명타워 설치 착공

- ‘17. 08. 18. : 총괄 준공

ㅇ 정동 생활체육시설 조성

‣ 총 사업비 : 1,800백만원(국비 400, 시비 1,400)

‣ 총 공정률(%) : 100%

- ‘15. 04. 23. : 공유재산심의회 가결

- ‘15. 06. 25. : 도시계획위원회 심의

- ‘15. 12월 : 도시관리계획 결정 및 실시계획 인가

- ‘16. 09. 06. : 공사 착공

- ‘17. 10. 13. : 공사 완료

ㅇ 다목적체육관 및 체력단련장 조성

‣ 총 사업비 : 3,000백만원(국비 900, 시비 2,100)

‣ 총 공정률(%) : 10%

- ‘17. 03. 16. : 투자심사 조건부 승인

- ‘17. 12. 01. : 관리계획 변경 용역 시행

- ‘18. 01. 05. : 실시설계용역 시행

ㅇ 곤명 생활체육시설 조성

‣ 총 사업비 : 300백만원(국비 90, 시비 210)

‣ 총 공정률(%) : 100%

- ‘15. 5~12월 : 토목부분 준공(테니스장 1면)

- ‘16. 6~8월 : 건축부분 준공(화장실, 게이트볼장 정비)

ㅇ 사남 족구장 조성

‣ 총 사업비 : 200백만원(시비 200)

‣ 총 공정률(%) : 100%

- ‘16. 5월 : 공사 준공

ㅇ 삼천포 테니스장 조성

‣ 총 사업비 : 50백만원(시비 50)

‣ 총 공정률(%) : 100%

- ‘16. 5월 : 공사 준공

ㅇ 다목적체육시설 조성

‣ 총 사업비 : 1,150백만원(시비 1,150)

‣ 총 공정률(%) : 100%

- ‘17. 3월  : 실시설계완료

- ‘17. 6월  : 공사 착공

- ‘17. 10. 13. : 공사 완료

ㅇ 어린이 체육시설 설치

‣ 총 사업비 : 300백만원(시비 300)

‣ 총 공정률(%) : 100%

- ‘17. 3~4월  : 실시설계용역

- ‘17. 5월  : 실시설계용역 완료

- ‘17. 6월  : 일상 감사 및 계약심사

- ‘17. 9월  : 공사 착공

- ‘17. 12월  : 공사 준공

ㅇ 사천공설게이트볼장 공용화장실 설치공사

‣ 총 사업비 : 300백만원(도비 200, 시비 100)

‣ 총 공정률(%) : 100%

- ‘17. 5월  : 실시설계용역

- ‘17. 8월  : 일상감사 및 계약심사

- ‘17. 9월  : 공사 착공

- ‘17. 12월  : 공사 준공

□ 향후 추진계획

ㅇ 용현 생활체육시설 조성

- ‘18. 04월   : 농업진흥구역 해제 협의 진행

- ‘19. 03월   : 공사 착공(보상병행)

- ’21. 12월   : 공사 준공