자연친화적 근린공원 조성

관리번호		7-8		주관부서		녹지공원과(공원팀)
임기구분		사업구분		예산구분		추진현황					이행률 (%)
임기내	중장기	신규	계속	예산	비예산	완료		추진중		미착수
						종료	지속추진	정상	부진
	○		○	○				○			64

ㅇ 쾌적한 공원환경 조성ㆍ관리로 이용객 편의제공 및 시민의 삶의 질 향상

□ 사업개요

ㅇ 위    치 : 성내공원 외 5개소(모충, 노대, 월성, 송포, 목섬)

ㅇ 사업기간 : 2015년 ~ 2018년

ㅇ 사 업 량 : 6개소 369,645천㎡

ㅇ 사 업 비 : 6,000백만원(국비 200  도비 60,  시비 5,740)

구 분	총 액	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년 (임기내)	2018이후 (임기후)
계	6,000	1,700	100	500	205	1,838	1,657
국 비 도 비 시 비 민자 등	200 60 5,740	1,700	100	200 60 240	205	1,838	1,657

(단위 : 백만원)

단위사업	완료목표	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2018이후
추진율(누계)	100%	33%	37%	41%	53%	70%	100%
자연친화적 근린공원 조성	100%	부지매입 및 공원조성	부지매입 및 공원조성	부지매입 및 공원조성	부지매입 및 공원조성	부지매입 및 공원조성	부지매입 및 공원조성

□ 연도별 달성목표

□ 추진실적

ㅇ 기 투자실적 : 2,505백만원

ㅇ '17. 투자실적 : 205백만원(시비 205)

- 성내공원 : 부지매입 175백만원

- 모충공원 : 산책로 연결 30백만원

ㅇ 총 공정률(%) : 64%

□ 향후 추진계획

ㅇ 2018년 : 노대. 성내ㆍ모충공원 토지매입 및 공원조성 1,838백만원

ㅇ 2019년 이후 : 성내공원 등 부지매입 및 공원조성 1,657백만원

□ 문제점 및 대책

ㅇ 시 재정여건상 공원부지 매입을 통한 공원조성이 어려워 10만㎡ 이상 공원

(월성, 노대공원)은 민간참여 유도로 계획중이나 민간참여 전무

ㅇ 중앙기관ㆍ산림청 등 국․도비지원 공모사업에 지속적인 노력 경주