면소재지 정비사업

관리번호		2-12		주관부서		지역개발과(농촌개발팀)
임기구분		사업구분		예산구분		추진현황					이행률 (%)
임기내	중장기	신규	계속	예산	비예산	완료		추진중		미착수
						종료	지속추진	정상	부진
	○		○	○				○			85

ㅇ 면소재지를 농어촌지역의 중심공간으로 육성하여 주민복지향상

□ 사업개요

ㅇ 위    치 : 사천시 면소재지 일원

ㅇ 사업기간 : 2013년 ~ 2020년(소재지별 4~5년)

ㅇ 사 업 량 : 서포면 소재지외 2개소(계속-서포, 곤양 / 신규-곤명)

ㅇ 사 업 비 : 18,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년 (임기내)	2018.7.이후 (임기후)
계	18,900	3,100	3,127	4,540	4,987	1,450	1,696
국 비 도 비 시 비 민자 등	13,202 1,698 4,000	2,170 279 651	2,189 282 656	3,151 404 985	3,490 449 1,048	1,015 131 304	1,187 153 356

□ 연도별 달성목표

단위사업	완료목표	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년 이후
추진율(누계)	100%	20%	35%	40%	50%	80%	90%	100%
면소재지 정비사업		계획수립	절차 및 보상 (서포면) 절차이행 (곤양면, 곤명면)	공사 (서포면) 기본계획승인 (곤양면)	공사 (서포면) 시행계획 및 보상추진 (곤양면) 기본계획승인 (곤명면)	공사 및 준공 (서포면) 보상 및 공사 (곤양면) 시행계획 및 보상추진 (곤명면)	공사 (곤양면, 곤명면)	공사 및 준공

□ 추진실적

〈서포면소재지 종합정비사업〉

ㅇ 2013. 11. : 기본계획 고시

ㅇ 2014.  1. : 총괄공사발주(2014.1.9.~2017.1.7.)

ㅇ 2014.  7. : 시행계획 고시

ㅇ 2015.  9. : 주민복지센터건립, 재래시장정비, 위험지사거리정비 완료

ㅇ 2016.  1. : 서포면소재지 종합정비사업(2016년분) 보상협의 및 공사 추진

ㅇ 2016. 12. : 시행계획 (변경)고시(사업기간 연장)

ㅇ 2017.  8. : 2016년분 및 총괄분 준공

〈곤양면소재지 종합정비사업〉

ㅇ 2015.  1. : 기본계획 수립 고시

ㅇ 2016. 12. : 시행계획 수립, 문화재 시발굴조사 착수

ㅇ 2017.  3. :  공사 착수

ㅇ 2017. 11. :  보상계획 공고(3차)-화초골 도시계획도로

〈곤명면중심지 활성화사업〉

ㅇ 2016.  5. : 기본계획수립 용역 착수

ㅇ 2017.  3. : 기본계획수립 고시

ㅇ 2017.  5. : 시행계획수립 용역 착수

ㅇ 2017.  7. : 추진위원회 재구성 및 회의 개최

ㅇ 2017. 11. :  보상계획 공고

□ 향후 추진계획

<서포면소재지 종합정비사업>

ㅇ 2018. 6. : 정산 및 완료보고

〈곤양면소재지 종합정비사업〉

ㅇ 2018. 10. : 사업 준공 예정

〈곤명면중심지 활성화사업〉

ㅇ 2018.  4. : 공사발주(총괄계약 및 금회분 착수)

□ 문제점 및 대책

ㅇ 보상협의 지연

ㅇ 미 협의 보상 필지 수용 재결 이행