테마형 생태하천 만들기

관리번호		2-14		주관부서		건설수도과(하천팀)
임기구분		사업구분		예산구분		추진현황					이행률 (%)
임기내	중장기	신규	계속	예산	비예산	완료		추진중		미착수
						종료	지속추진	정상	부진
	○		○	○			○				100

ㅇ 자연과 생물이 되살아나는 시민들의 친숙한 생태하천조성,

ㅇ 고유한 역사, 문화 공간과 연계한 친수공간을 조성하는 등 과거, 현재, 미래가         공존하며 정감어린 아름다운 하천을 조성

ㅇ 생태하천 조성으로 문화 및 여가 공간 확보로 시민의 삶의 질 향상

□ 사업개요

ㅇ 위    치 : 사천시 관내

- 지방하천(사천강, 중선포천, 목단천, 송전천, 묵곡천, 봉남천)

- 소 하 천(신벽천, 상촌천, 학촌천)

ㅇ 사업기간 : 2014년 ~ 2018년

ㅇ 사 업 량 : 생태하천 조성 L=20.58km

ㅇ 사 업 비 : 39,928백만원(국비21,958, 도비6,579, 시비11,391)

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년 (임기내)	2018년 (임기후)
계	39,928	19,821	6,633	6,774	6,100	600
국 비 도 비 시 비 민자 등	21,958 6,579 11,391	11,533 3,251 5,037	3,650 500 2,483	3,425 1,264 2,085	3,050 1,324 1,726	300 240 60

□ 연도별 달성목표

단위사업	완료목표	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
추진율(누계)	100%	10%	30%	70%	90%	100%
테마형 생태하천 만들기		신벽소하천 준공	송전천, 봉남천 준공	상촌천, 목단천, 중선포천 준공	묵곡천 준공	학촌소하천 준공

□ 추진실적

ㅇ 2013. 12. : 송전천 하도 준설사업 착공

ㅇ 2013. 09. : 신벽소하천 정비공사 착공

ㅇ 2014. 03. : 중선포천 수해상습지 개선사업 착공

ㅇ 2014. 04. : 상촌소하천 실시설계용역 완료 및 보상협의

ㅇ 2014. 06. : 목단천 하도 준설사업 착공(총괄분, 2014년도분)

ㅇ 2014. 10. : 신벽소하천 정비공사 준공

ㅇ 2015. 01. : 목단천 하도 준설사업 착공(2015년도분)

ㅇ 2015. 01. : 송전천 하도 준설사업 준공

ㅇ 2015. 02. : 묵곡천 수해상습지 개선사업 실시설계용역 착수

ㅇ 2015. 02. : 상촌소하천 정비공사 착공

ㅇ 2015. 04. : ‘16년도 지방하천 정비사업 신청(경남도, 부산청)

ㅇ 2015. 06. : 봉남2지구 수해상습지 개선사업 준공

ㅇ 2015. 06. : 학촌소하천 정비공사 실시설계용역 완료

ㅇ 2015. 07. : 묵곡천 수해상습지 개선사업 실시설계용역 완료

ㅇ 2015. 10. : 목단천 하도 준설사업(상류부) 시행 및 계약심사

ㅇ 2015. 11. : 목단천 하도 준설사업(상류부) 착공

ㅇ 2015. 12. : 학촌소하천 정비공사 분할측량, 감정평가 및 보상협의

ㅇ 2016. 01. : 묵곡천 수해상습지 개선사업 보상협의 및 공사 착공

ㅇ 2016. 03. : 학촌소하천 정비공사 착공

ㅇ 2016. 05. : 목단천 하도 준설사업 준공(2014년도분)

ㅇ 2016. 06. : 중선포천 수해상습지 개선사업 준공

ㅇ 2016. 08. : 상촌소하천 정비공사 준공

ㅇ 2016. 12. : 목단천 하도 준설사업 준공

ㅇ 2017. 02. : 목곡소하천 정비사업 착공

ㅇ 2017. 03. : 학촌소하천 정비공사(2017년분) 착공

ㅇ 2017. 04. : 학촌소하천 정비공사(2016년분) 준공

ㅇ 2017. 09. : 목단천(묵곡지구) 하도준설사업 준공

ㅇ 2017. 11. : 사천강(학촌지구) 일반하천 정비사업 준공

ㅇ 2017. 11. : 죽천천(송암지구) 일반하천 정비사업 착공

ㅇ 2018. 03. : 죽천천(송암지구) 일반하천 정비사업 준공

ㅇ 2018. 03. : 구평천(구평지구) 일반하천 정비사업 실시설계용역 착공

ㅇ 2018. 03. : 구평천(구평지구) 일반하천 정비사업 실시설계용역 준공

ㅇ 2018. 03. : 묵곡천(묵곡지구) 지방하천 준설사업 실시설계용역 착공

ㅇ 2018. 06. : 묵곡천(묵곡지구) 지방하천 준설사업 실시설계용역 준공

ㅇ 2018. 06. : 구평천(구평지구) 일반하천 정비사업 착공

□ 향후 추진계획

ㅇ 2018. 06. : 묵곡천(묵곡지구) 지방하천 준설사업 착공