친환경 어업기반 조성 및 경쟁력 있는 수산업 육성

관리번호		4-1		주관부서		해양수산과(자원조성팀)
임기구분		사업구분		예산구분		추진현황					이행률 (%)
임기내	중장기	신규	계속	예산	비예산	완료		추진중		미착수
						종료	지속추진	정상	부진
	○		○	○			○				100

ㅇ 연안 바다목장 및 해중림 조성, 인공어초 시설 등을 통한 친환경 어업기반

조성으로 안전한 어업경영체제 구축을 통한 어업인 소득증대 도모

□ 사업개요

ㅇ 위    치 : 관내 연안해역 일원

ㅇ 사업기간 : 2007년 ∼ 2019년

ㅇ 사 업 량 : 소규모 바다목장 및 해중림 조성 1식

ㅇ 사 업 비 : 9,750백만원(국비 5,100, 도비 1,925, 시비 2,725)

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년 (임기내)	2018.7.이후 (임기후)
계	9,750	5,750	2,400	400	400	400	400
국 비 도 비 시 비 민자 등	5,100 1,925 2,725	3,100 1,325 1,325	2,000 120 280	120 280	120 280	120 280	120 280

□ 연도별 달성목표

단위사업	완료목표	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년 이후
추진율(누계)	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%
친환경어업 기반 조성 및 경쟁력있는 수산업육성	100		∘소규모바다목장 조성 : 계획수립 및 협약체결 ∘해중림조성 : 1개소, 자연석 및 인공어초시설 각 1식	소규모바다목장내 어초설치 3기, 종묘방류 155천미, 자연석 고르기 1개소 및 어획, 서식생물상 조사 실시 등	소규모바다 목장 사업지 내 인공어초 시설 313개, 서식생물상 조사 해적생물 구제 등	팔각반구형소형강제어초(3기), 효과조사(4회) 조식동물·해적생물 구제 등	2019년 소규모 바다목장조성사업 세부추진계획 수립 후 추진 (5개년 준공년도)

□ 추진실적

ㅇ 2016. 01.∼12. : 2016년도 소규모바다목장조성사업 추진

- 팔각반구형중형강제어초 3기 설치, 볼락 종묘(155천미), 자연석 고르기, 어획 및

서식생물상 조사, 관리위원회 개최 2회 등

ㅇ 2017. 01. 31. : 2017년 소규모바다목장조성사업 세부추진계획 수립

ㅇ 2017. 03. 09. : 2017년 소규모바다목장조성사업 보조금 교부결정 및 교부

(시 ⇒ 한국수산자원관리공단)

ㅇ 2017. 03. 21.∼2017. 11. 10. : 소규모바다목장 어획 및 서식생물상 조사용역

ㅇ 2017. 04. 24.∼2017. 09. 23. : 소규모바다목장 사각형어초 제작

ㅇ 2017. 09. 25.∼2017. 09. 27. : 어초시설(사각어초 313개)

ㅇ 2017. 11. 14.∼2017. 12. 13. : 해적생물구제(1식)

ㅇ 2018. 02. 28. : 2017년 사업비 정산 및 2018년 위탁사업비 교부

ㅇ 2018. 03. ~ 06. : 어획·서식생물상 조사 실시(2회)

ㅇ 2018. 05. ~ 06. : 인공어초 제작·설치(팔각반구형 소형강제어초 3기)

□ 향후 추진계획

ㅇ 2018. 07. ~ 10. : 사각어초 제작·설치(낙찰 잔액분)

ㅇ 2018. 07. ~ 11. : 효과조사(8월 : 3차, 11월 4차)

ㅇ 2018. 12.       : 2018년도 사업 완료보고 및 정산

ㅇ 2019. 01. ~ 12. : 5차연도 사업추진