농산물 유통체계 혁신

(농산물종합가공센터 설치)

관리번호		4-15(2)		주관부서		미래농업과(생활자원팀)
임기구분		사업구분		예산구분		추진현황					이행률 (%)
임기내	중장기	신규	계속	예산	비예산	완료		추진중		미착수
						종료	지속추진	정상	부진
○		○		○		○					100

ㅇ 농업기술센터를 지역농산물 가공기술의 전진기지화

ㅇ 농산물 가공 희망농가의 수요에 맞는 품목·장비 선정으로 상시운영 체계 확립

ㅇ 개인별 가공사업장 설비투자 없이도 생산한 농산물 직접 가공 판매할 수

있는 가공센터 설치로 효율성 증대

ㅇ 농산물 가공기술의 이전, 보급, 확산을 통한 농외소득 창출 지원

□ 사업개요

ㅇ 위    치 : 농업기술센터 내(용현면 신복리 500-10)

ㅇ 사업기간 : 2015년 ~ 2017년

ㅇ 사 업 량 : 1개소

ㅇ 사업내용 : 농산물가공센터 신축(330㎡), 가공설비 구축

ㅇ 사 업 비 : 1,300백만원(국비 100, 도비 450, 시비 750)

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년 (임기내)	2018.7.이후 (임기후)
계	1,300		500	800
국 비 도 비 시 비 민자 등	100 450 750		150 350	100 300 400

단위사업	완료목표	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년 이후
추진율(누계)	100%	%	20%	60%	100%	%	%
농산물종합가공센터 설치			계획수립 행정절차 이행	실시설계 및 착공	준공	운영

□ 연도별 달성목표

□ 추진실적

ㅇ 기 설치 지역 현장 벤치마킹 : 2015. 1.(완주군, 군산시)

ㅇ 2015년 농산물종합가공센터 설치 추진 계획 : 2015. 1.

ㅇ 사천시농산물종합가공센터 설치 기본조사 용역완료 : 2015. 6.

ㅇ 도시계획시설결정(변경) 용역 완료 및 승인 : 2015. 12.

ㅇ 농산물가공 전문인력 양성교육 : 2014. 10. ~ 2017. 6. / 260명

- 14년 1과정 40명 / 15년 2과정 70명 / 16년 3과정 120명 / 17년 2과정 60명

ㅇ 농산물가공센터 부지 내 무연분묘 개장 완료 : 2016. 8

ㅇ 농산물가공센터 공정설계 완료 : 2016. 8

ㅇ 농산물가공센터 건축공사 토목·건축 실시 설계용역 완료 : 2016. 8.

ㅇ 농산물가공센터 건축공사 도 계약심사 의뢰 : 2016. 9.

ㅇ 농산물가공센터 건축공사 착공 : 2016. 11.

ㅇ 사천시 농특산물을 이용한 가공식품 개발용역 완료 : 2016. 5. ~ 12.

ㅇ 농산물종합가공센터 브랜드 및 포장디자인 개발용역 완료 : 2016. 9. ~ 12.

ㅇ 농산물종합가공센터 건립공사 준공 : 2017. 6.

ㅇ 가공기계 및 가공장비 구축 계약체결 : 2017. 6.

ㅇ 가공기계 및 가공장비 구축 및 시운전완료 : 2017. 8. ~ 9.

ㅇ 농산물종합가공센터 운영 조례 재정완료 : 2017. 9.

ㅇ 농산물종합가공센터 준공식 : 2017. 10.

ㅇ 농산물종합가공센터 등기완료 : 2017. 12.

□ 향후 추진계획

ㅇ 민선 6기 공약사업 추진 완료에 따른 농산물종합가공센터 운영 관리