기숙형 명문 중‧고등학교 육성지원

관리번호		5-2		주관부서		평생학습센터(교육지원팀)
임기구분		사업구분		예산구분		추진현황						이행률 (%)
임기내	중장기	신규	계속	예산	비예산	완료		추진중			미착수
						종료	지속추진		정상	부진
○			○	○					○			96

ㅇ 기숙형 중‧고교 육성지원을 통한 교육여건 개선으로 지역 인재 양성

□ 사업개요

ㅇ 사업기간 : 2014년 ~ 2018년(5년)

ㅇ 사 업 량 : 4개 학교

- 기숙형 등 명문고교 육성지원 : 고교 3개소

- 거점 기숙형 중학교 설립 : 중등 1개소

- 기숙사 및 다목적 시청각교실 건립지원 : 고교 1개소

ㅇ 사 업 비 : 25,180백만원(국비 18,850 시비 5,830 민자 등 500)

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년 (임기내)	2018.7.이후 (임기후)
계	25,180	1,480	800	300	5,800	16,800
국 비	18,850				2,500	16,350
도 비
시 비	5,830	1,480	800	300	2,800	450
민자 등	500				500

□ 연도별 달성목표

단위사업	완료목표	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년 이후
추진율(누계)	96%	25%	43%	61%	79%	96%	%
기숙형 명문 중·고등학교 육성지원	기숙형 명문 중·고등학교 육성	고교 3개교 지원	고교 3개교 지원	고교 3개교 지원	고교 3개교 지원	고교 3개교 지원

□ 실천계획

ㅇ 동부권(고 2개교) : 용남고(운영지원), 사천고교(운영지원)

- 사천고등학교 기숙사 및 다목적 시청각교실 건립 지원

· 사업비 : 6,000백만원 (시비 3,000, 특별교부금 2,500, 학교법인 500)

· 다목적 시청각 교실 : 지상 1층 810㎡

· 기숙사 : 34실, 지상 2 ~ 4층, 연면적 3,300㎡

ㅇ 남부권(고 1개교) : 삼천포공업고(운영지원), 삼천포고(운영지원)

ㅇ 서부권(중 1개교) : 곤양중, 서포중, 곤명중 서부 3개면 대상

- 사천교육지원청 연계 거점형 중학교 건립 추진

□ 추진실적

ㅇ 동지역 학숙관 건립 추진

- 2015. 5. 4. : 의견수렴 간담회 실시

- 2015. 6. 3. : 시민토론회 개최

⇛ 학교별 자체적으로 기숙사 건립할 경우 50% 市 대응투자 적극 검토

ㅇ 사천고등학교 기숙사 및 다목적 시청각교실 건립 지원

- 사 업 비 : 6,000백만원 (특별교부금 2,500, 학교법인 500, 시비 3,000)

- 사업기간 : 2015 ~ 2017년(3년)

- 사업내용 : 지상 4층, 연면적 4,110㎡, 기숙사 34실(136명 수용)

- 추진현황

· 2015. 12월 ~ 2016. 12월 : 설계용역 및 실시설계

· 2017.  1. 17. : 공사착공

· 2017. 12. 12. : 기숙사 준공

· 2018. 3월초 : 2018년도 신입생 입소(34실 / 136명)

ㅇ 명문고교 육성 및 특성화고교 운영지원 : 4개교 / 1,550백만원

- 지원기간 : 2014 ~ 2018년

- 지원내용

· 용남고등학교 : 기숙형고교 운영지원

· 삼천포고등학교 : 거점형 교과교실제 운영지원

· 삼천포공업고등학교 : 항공·조선기계분야 양성지원

· 사천고등학교 : 기숙형 고교 운영지원

ㅇ 삼천포고교 기숙사 건립에 따른 市 대응투자 지원 확약 : 25억원

- 총사업비 : 50억원(시비 25억 / 특별교부금 20억 / 학교 5억)

- 사업기간 : 2018 ~ 2021년

- 사 업 량 : 기숙사 및 다목적 훈련실, 지상 4층, 연면적 2,505㎡,

기숙사 24실(96인 수용)

ㅇ 중 ․ 고교 육성지원

- 지원기간 : 2014 ~ 2018년

- 지원내용

· 방과 후 학교 운영지원 : 9개교 / 185백만원

· 인문계고 논․구술 특강 운영지원 : 3개교 / 243백만원

□ 향후 추진계획

ㅇ 삼천포고교 기숙사 건립 추진에 따른 유관기관의 협조체계 지원

□ 문제점

ㅇ 사천교육지원청 거점형 기숙중학교 건립 추진사항 “재검토” 결정

- 총사업비 : 225억원(국비)

- 부지면적 : 45,000㎡

- 운영형태 : 기숙형, 공립중학교(7학급 150명)

- 추진내용

· 2015. 2. 26. : 설립위원회 위치선정(서포면 외구리 산 120일원)

· 2016. 4. 25. : 경남도교육청 2016년도 정기 중앙투자심사 결과 ‘재검토’ 결정됨