사천시청 직장어린이집 설치 운영

관리번호		5-5		주관부서		행정과(후생팀)
임기구분		사업구분		예산구분		추진현황					이행률 (%)
임기내	중장기	신규	계속	예산	비예산	완료		추진중		미착수
						종료	지속추진	정상	부진
○		○		○				○			90

ㅇ 자녀를 둔 직원들이 업무에 전념할 수 있도록 자녀보육 여건 조성

□ 사업개요

ㅇ 위    치 : 사천시 용현면 시청로 77(사천시청 필로티층)

ㅇ 사업기간 : 2015. 8. ~ 2018. 8.

ㅇ 사 업 량 : 시설규모 581㎡(보육정원 70명 정도)

※ 2층 주민편의시설 735㎡ 별도

ㅇ 사 업 비 : 2,831백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년 (임기내)	2018년 (임기후)
계	2,831			64	446	2,321
국 비 도 비 시 비 민자 등	2,831			64	446	2,321

□ 연도별 달성목표

단위사업	완료목표	2015년	2016년	2017년	2018년
추진율(누계)	100%	10%	20%	50%	100%
사천시청 직장어린이집 설치 운영	100%	계획수립	실시설계	공사	준공 및 운영

□ 추진실적

ㅇ 2015. 08. : 사천시청 직장어린이집 설치(변경)계획 방침

※ 위치 : 용현면 시청로 77(행정동 필로티층 2개층 증축)

ㅇ 2016. 07. ~ 2017. 02. : 실시설계 용역

ㅇ 2017. 03. : 지방재정계획심의위원회 심의

ㅇ 2017. 03. ~ 2017. 04. : 공사 설계의 경제성 검토(VE) 용역

ㅇ 2017. 05. : 사천시청 직장어린이집 및 주민편의시설 설치(변경)계획 방침

※ 면적 및 사업비 증가 : 308㎡ 1,127백만원 증

ㅇ 2017. 05. : 공유재산심의회 변경 심의

ㅇ 2017. 08. : 사천시청 직장어린이집 운영 방안 검토 보고 → 위탁운영 결정

※ 직장어린이집 견학(도청 외 5개소), 직영·위탁 비교분석

ㅇ 2017. 09. :「사천시청 직장 어린이집 설치 및 운영규정」제정

ㅇ 2017. 09. : 2회 추경예산 확보(1,200백만원 증)

ㅇ 2017. 11. : 직장어린이집 민간위탁 동의안 의회 승인

ㅇ 2017. 11. : 공사 착공(공사기간 : 2017.11.30.~ 2018.06.29.)

ㅇ 2018. 03. : 위탁운영체 선정(원장 1명)

- 모집 공고, 신청서 접수, 수탁기관선정위원회 구성 및 위촉, 위원회 개최

ㅇ 2018. 04. : 위탁운영체 선정결과 공고 및 협약 체결

ㅇ 2018. 05. : 직장어린이집 원아모집(신청 13명, 3개반)

※ 만0세 7명, 만1세 5명, 만2세 1명

□ 향후 추진계획

ㅇ 2018. 06. : 공사 준공

ㅇ 2018. 06. ~ 2018. 07. : 보육교직원 채용

ㅇ 2018. 07. : 집기비품 및 교재·교구 구입, 어린이집 활동공간 확인검사

ㅇ 2018. 08. : 어린이집 인가 및 개원

ㅇ 2018. 11. : 어린이집 평가인증