삼천포항 낚시정보 종합회관 조성

관리번호		6-10		주관부서		해양수산과(어업지도팀)
임기구분		사업구분		예산구분		추진현황					이행률 (%)
임기내	중장기	신규	계속	예산	비예산	완료		추진중		미착수
						종료	지속추진	정상	부진
○		○		○					○		20

ㅇ 추진배경(필요성)

- 주 5일제 근무 및 국민여가 생활 향상으로 낚시레저 관광객 급증

- 낚시 레저객들의 휴식 공간 및 정보교환 장소 제공으로 레저관광산업 활성화

도모 및 해양관광 도시 이미지 제고

□ 사업개요

ㅇ 위    치 : 사천시 동금동 158-54번지(삼천포항 팔포어항구 내)

ㅇ 사업기간 : 2016년 ~ 2018년

ㅇ 사 업 량 : 낚시정보종합회관 건축(500㎡) 및 부잔교 시설

ㅇ 사 업 비 : 1,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년 (임기내)	2018년 (임기후)
계	1,800			300		1,500
국 비 도 비 시 비 민자 등	1,800			300		1,500

단위사업	완료목표	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년 이후
추진율(누계)	100%	0%	0%	20%	20%	100%	0%
삼천포항 낚시정보 종합회관 조성	100%			낚시어선 부잔교 설치		낚시정보회관 착·준공

□ 연도별 달성목표

□ 추진실적

ㅇ  2014. 09. : 낚시어선업자(자율관리공동체 회원) 의견수렴(찬반양론 비등)

ㅇ  2015. 01. : 실시설계비 예산확보 (2015 당초예산, 시비 30백만원)

ㅇ  2015. 02. : 사업예정지 선정관련 낚시동호인 의견수렴

ㅇ  2015. 04. : 어업인, 해당어촌계 의견 수렴

ㅇ  2015. 04. : 낚시회관 건립사업비 경남도 및 해양수산부 예산계상 신청

(국비 10억, 도비 4억, 시비 4억)

ㅇ  2015. 05. ~ 08. : 국비 예산확보위해 해양수산부 방문 건의(3차)

ㅇ  2015. 05. : 삼천포항 관리청(경상남도 항만물류과)과 부지사용 가협의

ㅇ  2015. 08. 11. : 공유재산심의회 심의결정

ㅇ  2015. 09. 15. : 시의회 임시회 공유재산관리계획 안 부결

(시 재정 여건 상 시기상조로 부결)

ㅇ  2015. 09. 21. : 삼천포항 낚시정보회관 건립관련 검토보고

(삼천포항다목적회관 활용 방안)

ㅇ  2016. 05. 04. : 시장 현장순시 시 낚시어선협회 회원 면담

- 낚시정보회관 필요성과 부잔교 설치 건의로 낚시정보회관 건립 재추진

ㅇ  2016. 05. 11. : 낚시레저 활성화관련 현안사항 처리계획 보고

- 낚시정보회관 건립 재추진, 부잔교 설치 예산편성(2016년 1회 추경 300백만원)

- 낚시어선 부잔교 설치 : 3개소

ㅇ  2016. 08. 26. : 낚시회관 건립사업비 지원 경남도 방문 건의

ㅇ  2016. 09. 28. : 2016년 제4회 공유재산심의회 의결

ㅇ  2016. 11. 10. : 2017년 공유재산관리계획안 의결(제206회 사천시의회 임시회)

ㅇ  2016. 12. 05. : 2017년 예산제안설명(시의회)

ㅇ  2016. 12. ~ 2017. 3. 15. : 삼천포항 낚시정보회관 건립위치 협의(10회)

ㅇ  2017. 02. 3. / 03. 10. : 삼천포항 낚시정보회관 건립부지 사용허가 협의(경남도 2회)

ㅇ  2017. 02. 14. / 02. 28. : 삼천포항 낚시정보회관 건립부지 현지실사(경남도 2회)

ㅇ  2017. 03. 16. : 삼천포항 낚시정보 종합회관 건립에 따른 문제점 보고

ㅇ  2017. 07. 12. : 삼천포항 낚시정보 종합회관 건립부지 사용 협의(경남도)

ㅇ  2017. 07. 18. : 삼천포항 낚시정보 종합회관 건립부지 사용 건의(경남도)

ㅇ  2017. 07. 19. : 삼천포항 낚시정보 종합회관 건립부지 현지 실사(경남도)

ㅇ  2017. 08. 25. : 경상남도지사 권한대행 방문 시, 건의(건립부지 사용 승인 건의)

ㅇ  2017. 09. 01. : 삼천포항 낚시정보 종합회관 건립부지 사용 협의(경남도)

ㅇ  2017. 09. 07. : 삼천포항 낚시정보 종합회관 건립부지 사용 협의(경남도)

ㅇ  2017. 09. 19. : 삼천포항 낚시정보 종합회관 운영계획 수립

ㅇ  2017. 10. 13. : 삼천포항 낚시정보 종합회관 건립부지 사용 협의(경남도)

ㅇ  2017. 10. 20. : 삼천포항 낚시정보 종합회관 건립부지 현지 실사(경남도)

ㅇ  2017. 10. 25. : 삼천포항 낚시정보 종합회관 건립 관련 건축물 배치 기본계획서

작성 협의

ㅇ  2017. 11. 23. : 건축물 배치계획 제출 및 주민설명회 일정 협의(경남도)

ㅇ  2017. 11. 27. : 주민설명회 시, 민원 사전 해소 협조(동서금동)

ㅇ  2017. 12. 19. : 주민설명회 개최(인근주민, 팔포어촌계, 낚시어선업자율관리어업                      공동체, 삼천포수협, 경남도 항만정책과, 해경, 동서금동주민센터 등)

[보고사항]

- 적정 부지 확보 애로 및 지역 주민 대다수가 건립 반대(사업추진 애로)

□ 향후 추진계획

ㅇ 경남도와 지속적인 협의(건의)로 적정 부지사용 승인 후 사업추진

ㅇ 추진계획(승인 후)

- 건축물 랜드마크화 ⇒ 디자인 등 현상 공모를 거쳐 건립 추진

- 관리·운영 주체 : 시 직영 관리(시설관리공단)