권역별 생활공원 조성

관리번호		7-7		주관부서		녹지공원과(녹지팀)
임기구분		사업구분		예산구분		추진현황					이행률 (%)
임기내	중장기	신규	계속	예산	비예산	완료		추진중		미착수
						종료	지속추진	정상	부진
○			○	○		○					100

ㅇ 도심지 녹지공간 확충으로 시민의 건강증진과 녹색서비스 제공

□ 사업개요

ㅇ 위    치 : 정동면 예수리 417번지 외 49개소

ㅇ 사업기간 : 2014년  ~ 2017년

ㅇ 사 업 량

-산림공원 3개소, 도심지 쉼터 18개소, 자투리땅 녹화 및 생활공원 등 28개소

ㅇ 사 업 비 : 4,983백만원(국비 1,151, 도비 976, 시비 2,856)

구 분	총 액	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년 (임기내)	2018년 (임기후)
계	4,983	1,335	1,495	1,510	643
국 비 도 비 시 비 민자 등	1,151 976 2,856	234 1,101	200 382 913	630 264 616	321 96 226

(단위 : 백만원)

단위사업	완료목표	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
추진율(누계)	100%	27%	57%	87%	100%	%
권역별 생활공원 조성	100%	계획수립 및 14년 공사시행	15년분 공사시행	16년분 공사시행	17년분 공사 시행 및 준공

□ 연도별 달성목표

□ 추진실적

ㅇ 2017.  4/4분기 까지

- 조성현황 : 산림공원 등 3개소, 도심지 쉼터 16개소, 자투리땅 녹화 및 생활공원                  등 46개소

- 투자실적 : 4,983백만원

- 총공정율 : 100%

□ 향후 추진계획

ㅇ 민선6기 공약사업 추진 완료에 따른 생활공원 유지 관리

□ 문제점 및 대책

ㅇ 생활공원 정비와 제초작업, 정자, 데크 등 사후관리 철저로 불편사항 해소