행정복지센터 신축

관리번호	사업성격		사업주체				완료시기		예산구분
	신규	계속	국가	도	시	민자 등	임기내	임기후	예산	비예산
1-1	○				○		○		○
주관부서	행정과(시정팀)				협조부서 (협조기관)		건축과

□ 목    적

◦ 대형 아파트 건립에 따른 행정수요에 선제적 대응

◦ 청사 신축으로 주민 편의도모 및 복지증진

□ 사업개요

◦ 사업대상 : 4개소(정동면, 사남면, 용현면, 동서금동)

◦ 사업기간 : 2018. ~ 2021.

◦ 사업내용

- 신축 3개소(정동면, 사남면, 용현면)

- 이전 신축 1개소(동서금동)

◦ 소요사업비 : 17,150백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6.	임기후
계	17,150	600	200	3,600	9,350	3,400
국 비
도 비
시 비	17,150	600	200	3,600	9,350	3,400
민자 등

※ 사업대상별 소요사업비

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6.	임기후
계	17,150	600	200	3,600	9,350	3,400
정동면	3,700	600	200	2,900
사남면	3,950				3,950
용현면	3,800			700	3,100
동서금동	5,700				2,300	3,400

□ 그 간 추진사항

〈정동면행정복지센터 신축〉

◦ 2016. 9. : 건립계획(시장방침)

◦ 2016. 10. : 중기지방재정계획 수립

◦ 2018. 7. : 경남도 투자심사위원회 승인

◦ 2018. 7.24. : 정동면 행정복지센터 신축계획 수립(시장 방침)

◦ 2018. 8.28. : 공유재산심의회 의결(정동면 행정복지센터 신축)

〈사남면사무소 신축〉

◦ 2017. 3. 9. : 사남면사무소 주차장 확장계획 수립

◦ 2017. 5.25. : 사남면사무소 도시관리계획(재정비) 지형도면 승인고시

◦ 2018. 8. 3. : 사남면 청사 신축 및 주차장 확장계획 수립(시장 방침)

◦ 2018. 8.28. : 공유재산심의회 의결(사남면사무소 주차장 확장 사업)

〈용현면사무소 신축〉

◦ 2018. 7.27. : 용현면 청사 신축 및 주차장 확장계획 수립(시장 방침)

◦ 2018. 8.28. : 공유재산심의회 의결(용현면사무소 주차장 확장 사업)

◦ 2018.10.25. : 경남도 투자심사위원회 승인

〈동서금동 주민자치센터 이전 신축〉

◦ 2018. 8. 3. : 동서금동 주민자치센터 이전 신축계획 수립(시장 방침)

□ 추진계획

구 분		정동면	사남면	용현면	동서금동
사업개요	위 치	대곡리 298-2 일원	화전리 1316-3 일원	송지리 228-1 일원	동서금동 159-3 일원
	사업기간	’18. 8. ~ ’19. 12.	’20. 1. ~ ’21. 12.	’18. 8. ~ ’20. 12.	’20. 1. ~ ’21. 12.
	사업비(백만원)	3,700	3,950	3,800	5,700
세부계획	도시계획시설 결정	완료	완료	2019. 2.	2019. 6.
	중기지방재정계획	2018. 9.	2018. 9.	2018. 9.	2018. 9.
	도 지방재정 투자심사	조건부	2019. 7.	조건부	2019. 7.
	공유재산심의 등	2018. 8.	2018. 8.	2018. 8.	2019. 9.
	주차장 및 관련 부지 매입	’18. 8. ~ ’19. 6.	’20. 1. ~ 12.	’19. 1. ~ 6.	’20. 1. ~ 12.
	공사 착공 및 준공	’19. 3. ~ 12.	’20. 1. ~ ’21. 12.	’20. 1. ~ 12.	’21. 1. ~ 12.

□ 연도별 추진목표

세부사업명	2018년	2019년	2020년	2021년
정동면행정복지센터 신축	주차장 부지 매입, 실시설계용역	공사 착공 및 준공
사남면사무소 신축		주차장 부지 매입, 행정절차 이행	주차장 부지 매입, 공사 착공	공사 준공
용현면사무소 신축	행정절차 이행	주차장 부지 매입, 행정절차 이행	공사 착공 및 준공
동서금동 주민자치센터 이전 신축		행정절차 이행	주차장 등 부지 매입	공사 착공 및 준공

※ 행정절차 : 중기지방재정계획 반영, 경남도 지방재정투자 심사 의뢰,
도시계획시설 결정, 공유재산심의 및 공유재산관리계획 반영 등

□ 문제점 및 대책

◦ 문제점

- 정밀구조안전진단 결과 C등급으로 경남도 지방재정투자 심사 승인 애로

- 주차장 확장사업과 연계 추진으로 편입토지 보상협의 애로

◦ 대  책

- 주민불편 및 내진보강 필요 건물의 당위성 부각으로 지방재정투자

심사 의뢰

- 토지 보상 협의와 토지 수용 재결 절차 병행

□ 기대효과

◦ 기존 건축물 내진력 및 구조안전성 부족으로 인한 재해위험성 해소

◦ 쾌적한 사무공간 확보, 주차난 해소 등 주민 불편 해소로 민원 서비스

품격 제고

◦ 지역별 특성화 프로그램 운영을 위한 시설 확충으로 복합문화기능

향상 도모