생활체육시설 확대 조성 및 정비

관리번호	사업성격		사업주체				완료시기		예산구분
	신규	계속	국가	도	시	민자 등	임기내	임기후	예산	비예산
1-11		○			○			○	○
주관부서	체육지원과(체육시설팀)				협조부서 (협조기관)

□ 목    적

◦ 시민들의 건강 증진 및 삶의 질 향상을 위한 생활체육시설 공간 조성

□ 사업개요

◦ 사업대상 : 4개소(사남, 용현, 곤양, 서포 생활체육시설)

◦ 사업기간 : 2018. ~ 2023.

◦ 사업내용 : 축구장, 풋살장, 족구장, 소규모 운동장 등 조성

- 사남, 용현, 서포 생활체육시설 조성

- 곤양 생활체육시설 정비

◦ 소요사업비 : 26,080백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6.	임기후
계	26,080	2,850	100	2,300	7,455	3,725	2,250	7,400
국 비	2,890	350			770	770		1,000
도 비	910				455	455
시 비	22,280	2,500	100	2,300	6,230	2,500	2,250	6,400
민자 등

□ 그 간 추진사항

◦ 용현 생활체육시설 조성

- 2017. 12. : 설계용역 시행(2018. 12. 완료예정)

- 2018. 4. : 문화재지표조사·지질조사용역 완료

- 2018. 5. : 주민설명회 개최

- 2018. 9. : 용역 중간보고회, 실시계획인가 신청

◦ 곤양 생활체육시설 조성

-  2017. 8. : 1차 준공

◦ 서포 생활체육시설 조성

- 2018. 9. : 주민·관련단체 의견수렴

□ 추진계획

◦ 사남 생활체육시설 조성

- 2019. 3. : 주민·관련단체 의견수렴

- 2021. 1. : 토지보상 협의

- 2022. 3. : 공사 착공

- 2023. 12. : 공사 준공

※ 사남면 중심지 활성화 사업과 연계 추진

◦ 용현 생활체육시설 조성

- 2019. 1. : 농업진흥구역 해제 신청

- 2019. 3. : 토지보상 협의 진행 및 문화재 시굴조사

- 2020. 6. : 공사 착공

- 2021. 12. : 공사 준공

◦ 곤양 생활체육시설 정비

- 2019. 3. : 토지보상 협의

- 2019. 10. : 2차 공사 착공

- 2020. 12. : 2차 공사 준공

◦ 서포 생활체육시설 조성

- 2021. 1. : 토지보상 협의

- 2022. 6. : 공사 착공

- 2023. 12. : 공사 준공

□ 연도별 추진목표

세부사업명	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 6월	임기후
사남 생활체육시설 조성		부지 선정	실시설계, 행정절차이행	부지 보상	공사 착공	공사 준공
용현 생활체육시설 조성	실시설계	부지 보상	부지 보상, 공사 착공	공사 준공
곤양 생활체육시설 정비		부지 보상, 공사 착공	공사 준공
서포 생활체육시설 조성	부지 선정	부지 선정	실시설계, 행정절차이행	부지보상	공사 착공	공사 준공

□ 문제점 및 대책

◦ 사남 생활체육시설의 부지 선정 필요

- 주민설명회, 공청회 등을 거쳐 조속히 부지 선정 진행

◦ 용현 생활체육시설 부지 내 1/3이 문화재 시굴조사 대상으로 사업

지연 우려

- 우선적으로 토지 보상 후 문화재 시굴조사 진행

□ 기대효과

◦ 지역별 생활체육시설 조성으로 접근성 용이

◦ 체육 인프라 구축 및 이용활성화로 선진체육 저변 확대