권역별 노인복지센터 건립

관리번호	사업성격		사업주체				완료시기		예산구분
	신규	계속	국가	도	시	민자 등	임기내	임기후	예산	비예산
1-4	○				○		○		○
주관부서	사회복지과(사회복지팀)				협조부서 (협조기관)

□ 목    적

◦ 날로 다양해져 가는 어르신들의 복지서비스 욕구에 부응

◦ 고령사회에 접어든 어르신들의 건강관리 및 여가선용을 위한 양질의 복지서비스 제공

□ 사업개요

◦ 사 업 명 : 권역별 노인복지센터 건립

◦ 위    치 : 3개 권역(서부권, 동부권, 남부권)

◦ 사업기간 : 2018. ~ 2022.

◦ 사업내용 : 권역별 노인복지센터 1동 건립

- 건강증진실, 사회교육실, 복지후생실, 야외공간 등 조성

◦ 소요사업비 : 20,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6.	임기후
계	20,000			100	6,000	6,000	7,900
국 비
도 비
시 비	20,000			100	6,000	6,000	7,900
민자 등

□ 그 간 추진사항

◦ 2018. 9. : 건립 기본방침 결정

□ 추진계획

◦ 2019.  3. : 타당성 및 기본구상 용역

◦ 2019.  6. : 행정절차 진행(공유재산 심의, 투․융자 심사 등)

◦ 2019. 12. : 도시계획시설 결정

◦ 2020.  3. : 실시설계 용역

◦ 2020.  6. : 용역결과 보고회 개최

◦ 2020.  9. : 주민설명회 개최

◦ 2021.  3. : 공사 착공

◦ 2022.  6. : 공사 준공

□ 연도별 추진목표

세부사업명	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 6월	임기후
권역별 노인복지센터 건립	건립 기본방침 결정	기본구상용역, 행정절차이행	실시설계용역, 부지매입, 계약심사, 건축협의 등	공사 착공	공사 준공

□ 문제점 및 대책

◦ 많은 사업비 소요로 시 재정 여건상 사업기간 장기화 우려

□ 기대 효과

◦ 다양한 노후 여가생활을 영위할 수 있는 노인복지시설 확충

◦ 복지시설의 다변화, 집중화와 노인들에게 건강, 의료, 여가 등 다양한 복지서비스 제공으로 활력 넘치는 노후 생활 여건 조성