항공국가산업단지의 조기 완성

관리번호	사업성격		사업주체				완료시기		예산구분
	신규	계속	국가	도	시	민자 등	임기내	임기후	예산	비예산
2-4		○	○				○		○
주관부서	우주항공과(우주항공지원팀)				협조부서 (협조기관)		국토교통부, LH

□ 목    적

◦ 국내 최대의 항공산업 집적지 조성, 항공산업 G7 및 완제기 수출국으로 도약기반 마련

□ 사업개요

◦ 위    치 : 사천시 용현면 신촌리, 통양리, 선진리 일원

◦ 사업기간 : 2017. ~ 2021.

◦ 사 업 량 : 산업단지 조성 A=819,400㎡

◦ 사업내용 : 중형민항기 완제품 및 관련 부품 생산 기지화

◦ 사업시행자 : 한국토지주택공사(LH)

◦ 소요사업비 : 201,200백만원(공사비 89,200 보상비 112,000)

※ 한국토지주택공사에서 사업비 전액 예산 확보하여 직접 집행   (단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6.	임기후
계	201,200	2,600	70,000	77,500	22,700	28,400
국 비	201,200	2,600	70,000	77,500	22,700	28,400
도 비
시 비
민자 등

□ 그 간 추진사항

◦ 2014. 12. : 국가산업단지 조성 확정 발표(국토부)

◦ 2017.  5. : 경남 항공국가산업단지 승인 고시

◦ 2017.  8. : 국가산단 상호협력 약정서 체결(도-시-LH)

◦ 2017. 12. : 관리기본계획 고시

◦ 2018.  6. : 보상협의 실시

◦ 2018.  7. : 협의보상 완료(수용재결 병행)

□ 추진계획

◦ 2018. 12. : 보상 완료(수용재결)

◦ 2018. 12. : 공사 착공

◦ 2021.  6. : 분양 시작

◦ 2021. 12. : 공사 완료

◦ 2022.  6. : 분양 완료

□ 연도별 추진목표

세부사업명	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 6월	임기후
산업단지보상	보상완료
산업단지조성	공사 착공			공사 준공

※ 산업단지분양 : 2021. ~ 2022.

□ 문제점 및 대책

◦ 보상 지연 등으로 개발계획을 1차 변경(2020.→2021.)하였으나, 추후

여건을 고려하여 개발계획의 2차 변경(2021.→2022.)을 검토 중

→ 공정관리를 통한 공사기간 단축 유도

◦ 산업단지 준공 후 분양을 계획함에 따라 분양시기 지연

→ 공정관리·부분준공을 통한 선 분양 유도

◦ 산단공 수요조사 결과 국가산단 분양·임대 예상가격(120만원/평,

40,000원/평·년)으로 수요가 저조할 것으로 예상

→ 항공핵심기업체 방문 등으로 투자유치 유도,

분양가·임대료 조정을 위하여 국비 등의 지원 건의

◦ 이주대책 수립에 대한 주민과의 의견 차이로 민원 발생

(이주단지 선분양 요구)

→ 이주단지 선 분양 추진 요청, 침수지역 11가구 편입 건의

□ 기대효과

◦ 항공산업 G7 진입에 일조 및 항공산업 클러스터 완성

◦ 경제유발효과 1조971억원, 고용창출 5,623명