항공 MRO 산업단지 조기 완성

관리번호	사업성격		사업주체				완료시기		예산구분
	신규	계속	국가	도	시	민자 등	임기내	임기후	예산	비예산
2-6	○				○		○		○
주관부서	산단관리과(산단조성팀)				협조부서 (협조기관)		경상남도

□ 목    적

◦ 항공 선도기업 KAI 1·2공장이 인접한 지역에 항공 MRO 및 생산단지       조성으로 연구개발, 생산, MRO 복합항공산업 클러스터로 발전

□ 사업개요

◦ 사업위치 : 사천시 사천읍 용당리 일원

◦ 사업기간 : 2017. ~ 2022.

◦ 사 업 량 : 311,880㎡

※ 단계별 개발 : 1~2단계 149,424㎡, 3단계 162,456㎡

◦ 소요사업비 : 150,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6	임기후
계	150,000	7,585	12,293	61,271	33,600	20,000	15,251
국 비
도 비	60,000	2,585	3,000	24,175	13,440	8,000	8,800
시 비	90,000	5,000	9,293	37,096	20,160	12,000	6,451
민자 등

□ 그 간 추진사항

◦ 2014. 12. 23. : 항공정비사업(MRO) MOU 체결(경남도, 사천시, KAI)

◦ 2017. 12. 19. : 항공 MRO 사업자 선정(국토부)

◦ 2017. 12. 21. : 2018년 산업단지 지정계획 고시(경남 고시2017-521호)

◦ 2018.  1. 19. : 보상계획 열람 공고

◦ 2018.  3. 20. : 산업단지계획 수립 및 실시설계 용역 착수

◦ 2018.  6. 28. : 산업단지계획 수립 및 전략환경영향평가(초안) 합동설명회 개최

◦ 2018.  8. 17. : 관련 실과 협의 및 전략환경영향평가 협의

◦ 2018. 11. 22. : 경상남도 지방산업단지계획 심의위원회 개최(조건부 가결)

□ 추진계획

◦ 2018. 12. : 산업단지계획 승인 고시

◦ 2019.  1. : 지방건설기술심의위원회 기술 심의 요청

◦ 2019.  4. ~ : 보상협의 계속 및 공사추진

□ 연도별 추진목표

세부사업명	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
용당(항공 MRO) 일반산업단지 조성	산업단지계획 승인, 보상협의	보상협의 및 공사착공 (1단계)	보상협의 공사 착공 (2단계)	공사 중	사업 준공

□ 문제점 및 대책

◦ 당초 대비 총사업비 증액에 따른 시비 부담 가중으로 조기 완성 애로

→ 전체 중 1~2단계 조기 완료를 위한 예산확보 행정력 집중

◦ 용당(항공 MRO) 사업 부지 보상협의 지연

→ 예산 확보 1·2단계 동시 일괄 보상

□ 기대효과

◦ 2020년 항공산업 Global 7 진입 및 완제기 수출국 도약

◦ 항공우주산업 클러스터 조성으로 항공도시 이미지 제고